문서번호	원무과-13279
결재일자	2015.8.28.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	이종민	08/28 이동문
협 조

『보일러 세관 및 부대설비 공사』

설계변경 보고

2015. 8

서울특별시 은평병원

(원무과)

『보일러 세관 및 부대설비 공사』

설계변경 보고

보일러 안전검사 및 에너지효율 제고를 위한 보일러 세관 및 부대설비 공사 중 1호기 보일러 내부결함 발견에 따른 설계변경 사항에 대한 검토결과를 보고합니다.

공사개요

건    명 : 보일러 세관 및 부대설비 공사

계약금액 : 5,100,000원

계 약 자 : 진양열관리산업(대표 윤영한)

공사기간 : 2015. 6. 9. ~ 8. 28.

검토내용

1,2호기 보일러 세관작업은 완료하였으나 1호기 보일러에 결함이 발견되어

1호기 보일러에 대해 버너공연비 조정 미실시

견적서에 따라 산출한 감액금액

=(버너공연비조정비+일반관리비+이윤)×부가가치세반영×낙찰률×1/2

=(360,000+360,000×6%+360,000×15%)×110%×(5,100,000/5,346,000)×1/2

=228,555원

설계변경

당초(원)	변경(원)	증/감
5,100,000	4,871,445	△228,555

붙임  보일러 세관 견적서 1부.  끝.