문서번호	토목부-18424
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널건설과장	토목부장
강철규	권혁대	09/03 노우성

“응봉교 확장 및 성능개선 공사”

시의원 현장체험 실시결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  9.

도시기반시설본부

(토  목  부)

“응봉교 확장 및 성능개선 공사”

시의원 현장체험 실시결과 보고

응봉교 우선 개통(’15. 8.31.(월)15:40)에 앞서 지역 시의원 및 성동구청장과 함께 현장체험 행사를 실시하고 결과를 보고함.

Ⅰ		사업개요

○ 공사위치 : 성동구 응봉동 대림아파트앞 ~ 성수1가 삼표레미콘 앞

○ 공사규모 : 확장(B=4차로→6차로, L=693m), 성능개선(DB-18→DB-24)

○ 공사기간 : ‘08. 10. ~ ’16. 3.

○ 공사금액 : 881억원(기투자 712억원, `15년 예산 73억원, `16년 예산 96억원)

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 감 리 사 : ㈜ 건화 외1개사

○ 공    정 : 94%

Ⅱ		추진현황

○ `08.10. : 공사 착공

○ `11.12. : 중량천 횡단구간 주 경간 아치교 설치

○ `10. 4.  : 임시가교 설치완료

○ `15. 2.  : 기존 교량 철거 완료(철도횡단구간 L=110m)

○ `15. 4. ~ 7. : 디자인 심의 및 실시설계(터널형방음벽)

○ `15. 7. : 강교 가설(철도 횡단구간) 완료

○ `15. 8.31.(15:40) : 임시 개통 (왕복 4차로)

○ `15. 9. 현재 : 응봉교 남단 연결로 포장, 터널형방음벽 설치 중

Ⅲ		현장체험 개요

○ 일  시 : `15. 8.31.(월)11:00 ~ 14:00

○ 장  소 : 응봉교 상부(응봉역사 앞) → 종점부까지 도보 이동

○ 참석자 : 시의원(김기대, 박양숙, 박중화, 이상묵), 성동구청장, 구의원(신동욱), 도시기반시설본부(본부장, 토목부장)

○ 내  용 : 추진현황 보고, 방음벽 등 구조물에 대한 현장점검 등

Ⅳ		현장체험 결과

○ 현장을 보니 아파트, 상가, 응봉역사에 인접하여 있고, 철도횡단 등 공사가 어려운 여건에서 공사 현장관계자들의 노고가 많았음.

○ 금일 우선 4차로 개통으로 그동안 ‘S자“로 통행하였던 시민들의 불편이 해소되어 다행임.

○ 10월 중순 6차로 개통에 차질 없도록 방음벽 설치 등 공사 관리에 최선을 다해 주기 바람.

Ⅴ		향후 계획

○ `15. 9. ~ 10. : 터널형방음벽 설치 및 아스콘 포장(남단)

○ `15.10월 중순  : 전면 개통(6차로)

○ `15.10 ~ `16. 3. : 가설교량 철거 및 중랑천 원상복구

※ 계약자 부담으로 선 공사(터널형방음벽 설치)하는 비용은  주관부서(도로계획과)와 협의하여 2016년 예산반영 및 조기(1월) 집행토록 추진

【현황사진】

○ 현장체험 모습(시의원 등)

○ 응봉교 개통후 전경

붙임 : 시의원 보고자료 1부.   끝.