- 창동・상계 신경제중심지(CBD) 조성 관련 -

동북권 창업지원시설가칭 건립 개요

□  사업목적

○ ‘창동·상계 신경제중심지 조성’을 위한 마중물 사업으로,

○ 창업지원의 핵심거점 및 전략시설 유치를 위한 선도부지로, 동북권 창업지원시설 조성하여 ‘창동·상계 신경제중심지 조성’의 조기 가시화 및 일자리 창출

□ 대상지 현황

○ 위치: 도봉구 창동 1-8번지(7,663㎡중 일부)

- 토지소유: 서울시

- 재산관리관: 동북4구사업추진반/ 現도봉구 청소차량 차고지 사용中

○ 규모: 연면적 8,100㎡(미정)/ 일반상업지역

- 50+창업(인생이모작지원과) : 약2,500㎡ 사용검토 중

■ 위치도(원거리)
■ 위치도(근거리)	■ 현장사진

□ 그간 추진경위

○ `14.01.  : 시장님 기자설명회 - 동북4구 발전전략(행복4구플랜)

○ `14.03.  : 동북4구 발전전략 추진계획 수립

○ '14.05.  : 시장님 공약발표 - 창업도시 조성을 통한 아시아 지식기반허브 육성

○ '14.07.  : 시장님 청책토론회 – 「창동·상계 창업단지 조성」을 위한 청책토론회

(창업취업지원과→ 창동상계 창업단지 조성을 위한 중장기 발전계획수립)

○ '14.11.  : 「창동 창업지원시설 기본계획 수립」  방침

○ '15.02.  : 시장님 발표- 「창동․상계 신경제중심지」 '17년부터 3단계로 본격조성

○ `15.04.  : 창동상계 경제기반형 도시재생사업 지원신청(국토부 제출)

○ '15.06.  : 「동북권 창업지원센터 조성을 위한 타당성조사 및 기본계획 수립」 방침

○ '15.06.  : 「동북권 창업지원센터 조성 전문가 자문단 구성・운영계획」 방침

○ '15.06.~08 : 창업관련 전문가 자문회의 (창업관련전문가 5명 → 총8회)

○ '15.07.17 : 공유재산심사 (결과: 적정통과)

○ `15.08.28  : 시투자심사

□ 향후 단계별 추진일정

○ `15.10.31  : 중앙투자심사 예정

○ `15.09 ~   : 공유재산관리계획(시의회 의결 262회: 11.10~12.21)

○ `15.09 ~ `16.06 : 용역 시행

○ `16.03 ~ `16.07 : 설계공모

○ `16.08 ~ `16.12 : 실시설계

○ `17. ~ `18.     : 건축공사 시행