함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기성금 지급에 따른 선금 정산

우리 정수센터에서 발주한 아래 공사의 기성검사로, 행정자치부예규 제23호(2015.07.20) “지방자치단체입찰 및 계약집행기준의 제6장 선금 ․ 대가 지급요령”에 의거 아래와 같이 선금 정산 후 기성금을 지급하고자 합니다.

가. 공사내역

1) 공사명 : 암사아리수정수센터 1정수장 약품투입설비 개선공사

2) 계약상대자 : 유일개발(주) 박인택

3) 계약금액 : 금550,258,360원

4) 계약일 : 2015.06.04

5) 계약기간 : 2015.06.04 ~ 2015.09.30

나. 선금 정산 후 기성금 지급액

1) 선금 지급액 : 금275,000,000원

2) 금회 기성금 신청액 : 금495,000,000원

4) 현재공정 : 2015.07.10 기준 누계 89.95%

5) 선금 정산액 :  선금액 × 기성부분의 대가 상당액

계약금액

275,000,000 × 495,000,000

550,258,360        = 247,383,790원

6) 기성금 지급액 : 기성금 신청액 - 선금 정산액

495,000,000 – 247,383,790 = 247,616,210원

7) 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치, 시서비및부대비  끝.

주무관	변민용		행정관리과장	손수곤		소장	09/04 유성종
협조자
시행	행정관리과-8636	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02)3146-5712	/전송	02)3146-5707	/	byunmy@seoul.go.kr	/	부분공개(7)