문서번호	문화융합경제과-9186
결재일자	2015.8.18.
공개여부	비공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		문화산업정책팀장		문화융합경제과장
협 조

봉제박물관(가칭) 건립 부지

문화재 시굴조사 추진계획

2015. 8

경제진흥본부

(문화융합경제과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

창신동 봉제박물관(가칭) 건립 부지

문화재 시굴조사 추진계획

봉제박물관(가칭) 건립 부지에 대해 문화재 시굴조사 추진을 통해 문화유적 확인 및 유적 발견시 효과적인 개발방안을 수립하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함

□ 시굴조사 근거

○ 문화재보호법 제13조(역사문화환경 보존지역의 보호)

○ 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령 제4조(지표조사의 대상) 제1항 제4호 라목

서울특별시의 퇴계로·다산로·왕산로·율곡로·사직로·의주로 및 그 주변지역으로서

서울특별시의 조례로 정하는 구역에서 시행되는 건설공사

○ 서울특별시 문화재 보호조례 제50조(매장문화재 지표조사) 제2항

서울특별시의 퇴계로·다산로·왕산로·율곡로·사직로·의주로 및 그 주변지역으로서

별지 제5호서식이 정하는 서울성곽 내부 구역에서 시행되는 건설공사

○ 문화재청 문화재보존관리지도 검색 결과 : 시굴조사 지역

창신동 647-50,6

문화재 시굴조사 대상지역

(푸른색 표시)

□ 발굴조사 개요

○ 용 역 명 : 봉제박물관(가칭) 건립 부지 시굴조사 용역

○ 용역기간 : 계약일로부터 40일

○ 조사대상 : 종로구 창신동 647-50, 6(266.8㎡)

○ 과업내용

- 유구 확인을 위한 발굴조사

- 문화유적의 정확한 분포범위와 성격 규명

- 확인된 유구에 대한 보존방안 제시 및 보고서 작성 제출

□ 조사기관 선정

○ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조          (수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제4호 하목

「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제11조에 따른 문화재 발굴(조사)용역

○ 선정방법 : 문화재청장이 지정․고시한 전문기관(서울시 소재)중 선정

○ 선정절차

- 전문기관에 참여의사 및 조사계획서 제출 의뢰

- 조사계획서 검토 및 업체선정

‣선정기준 : 발굴조사 수행실적, 조사비용, 주변 발굴조사 경험, 서울시 지표조사 수행실적 등을 고려하여 저가 견적업체 선정

□ 예산 및 산출조서

○ 소요예산 : 8,860천원

사 업 명	단위	수량	산출조사근거		비고
			(재)한강문화재연구원	(재)한백문화재연구원
봉제박물관(가칭) 건립 부지 시굴조사 용역	식	1	8,860,000원	9,515,000원

○ 예산과목

- 경제진흥본부 문화융합경제과, 문화산업육성지원, 패션산업육성, 창신동 봉제

박물관 및 봉제거리 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 추진일정

○ ’15.  8월 3주 : 발굴조사 계약체결 의뢰(재무과)

○ ’15.  8월 4주 : 발굴조사 계약체결(재무과)

○ ’15.  9월 1주 : 발굴허가신청(문화재청)

○ ’15.  9월 3주 : 발굴조사

○ ’15.  9월 4주 : 발굴조사결과 보고 및 심의(문화재청)

○ ’15. 10월 1주 : 최종 보고서 작성 및 제출

붙임 : 1. 서울특별시 문화재 보호조례 제50조(매장문화재 지표조사) 제2항 별지제5호 도면 1부

2. 예정공정표 1부

3. 견적서 2부.  끝.