문서번호	토목부-18907
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
박웅교		이동훈	09/09 노우성
협조
	주무관		김동현

하천구간 우기대비 토사유실 방지시설 정산 보고

【동부간선도로확장공사(3공구)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

하천구간 우기대비 토사유실 방지시설 정산 보고

【동부간선도로확장공사(3공구)】

동부간선도로 확장 및 노원교 진입램프 철거 구간에 대하여 기존 호안시설을 철거함에 따라 우기시 제방 법면 토사유실 등이 우려되어 설치한 공사비를 반영코자 보고드림.

※관련근거 : 동삼감 제2015 - 120호(2015. 8.28)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

○ 공사규모 : 폭 4차로 → 6차로, 연장 2.25km

○ 도 급 비 : 57,594백만원

○ 공사기간 : ‘08. 2.15.～’15.12.31.

○ 감 리 사 : 동부엔지니어링㈜ 외 1

○ 시 공 사 : 세원건설㈜ 외 1

2		감리단 보고내용

○ 동부간선도로 확장 및 노원교 진입램프 철거구간에 대하여 기존 호안시설을 철거함에 따라 우기시 제방 법면 토사유실 등이 우려되어

○ 우기전 토사 노출 제방 법면을 보호코자 “톤백+천막”을 사전 설치한 사항으로 정산 처리함이 타당한 것으로 판단됨

- 추진 경위

날 짜	제 목	주 요 내 용	비 고
‘15.04.28	2015년 수해방지계획서 제출	하천협의조건 (6-9월공사일시중단)이행 및 하천구간 수방대책	시공사⇒감리단
‘15.05.20	2015년 수해방지계획서 보고	하천구간 수방대책 업무보고 및 협의	감리단⇒발주처
‘15.05.21	2015년 수방대비 조치계획에 따른 하천공사추진 촉구지시	수방대비조치계획 관련 인력장비투입관리철저	감리단⇒시공사

- 토사유실 방지 설치구간 및 단면도

STA.5+500∼5+767

STA.5+767∼6+070

- 공사물량(증․감) 대비표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
P.P마대쌓기 및 헐기	45*70cm	㎥	1,634	-	감 1,634
마대쌓기 및 헐기	Ton마대	㎥	-	875	증 875
PE천막지 설치		㎡	-	5,132	증 5,132
흙쌓기		㎥	-	4,256	증 4,256
흙헐기		㎥	-	3,182	증 3,182
터파기(토사)	인력+기계	㎥	-	419	증 419
pe연결관부설 및 접합	D300mm	m	-	7	증 7
PE관	300mm	본	-	1	증 1

구 분

주 요 내 용

비고

협의일자

○ 2015.05.11 계약당사자와 발주처 신규 단가 협의

증감수량

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법, 동 시행령, 동시행규칙 및

공사계약 일반조건 제20조 (설계변경으로인한 계약금액의 조정)②항

“계약대상자의 책임없는 사유”에 해당하므로 신규 협의단가 적용.

○ 단순 수량증감 공정은 공사계약 일반조건 제20조 (설계변경으로인

한 계약금액의 조정)①항1호에의거 계약단가 적용.

신규 비목

공 종	규 격	단위	산출가	협의율적용 (86.645%)	적 용
마대쌓기 및 헐기	Ton마대	㎥	30,148	26,122	26,122

○ 신규단가 적용                               (단위:원)

적 용

- 단가적용

- 공사비(증․감) 대비표

(단위:천원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비고
4. 구조물공	51,854	53,130	증 1,276
4.04 옹벽공
P.P마대쌓기 및 헐기	51,854	-	감 51,854
마대쌓기 및 헐기	-	22,856	증 22,856
PE천막지 설치	-	25,259	증 25,259
흙쌓기	-	1,927	증 1,927
흙헐기	-	1,543	증 1,543
터파기(토사)	-	1,302	증 1,302
pe연결관부설 및 접합	-	136	증 136
PE관(300mm)	-	103	증 103
직접공사비	51,854	53,130	증 1,276
간접공사비	16,145	16,541	증 396
도 급 액	67,999	69,671	증 1,672

3		조치계획

○ 동부간선도로 확장 및 노원교 진입램프 철거구간에 대하여 기존 호안시설을 철거함에 따라 우기시 제방 법면 토사유실 등이 우려되어 사전(톤백+천막) 설치한 사항으로 감리단 검토의견이 적정하므로 승인하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙  임 : 감리단 검토의견서  1부.  끝.