검 토 의 견 서

검토건명

하천점용구간 법면형성 및 보호천막 설치

공 사 명

동부간선도로확장공사(3공구)

검토자

책임건설사업관리기술자 김구환

제    목

실정보고(하천점용 구간 법면형성 및 천막보양) 승인 요청

□. 검 토 사 유

○ 동부간선도로 확장 가시설 설치구간의 토사유실 방지 및 동부간선도로 안전을

위하여 제방 법면에 톤마대 및 천막을 2015년 수방계획에 의거 우기 전

선 시행한 내용을 검토한 사항임.

□. 검 토 내 용

○ 추 진 경 위

날 짜	제 목	주 요 내 용	비 고
‘15.04.28	2015년 수해방지계획서 제출	하천협의조건 (6-9월공사일시중단)이행 및 하천구간 수방대책	시공사⇒감리단
‘15.05.20	2015년 수해방지계획서 보고	하천구간 수방대책 업무보고 및 협의	감리단⇒발주처
‘15.05.21	2015년 수방대비 조치계획에 따른 하천공사추진 촉구지시	수방대비조치계획 관련 인력장비투입관리철저	감리단⇒시공사

○ 위 치 도

○ 변 경 현 황 및 사유

- STA.5+500 ~ 5+767(단면도)

- STA.5+767 ~ 6+070(단면도)

- 사 유

* 동부간선도로 확장 및 노원교 진입램프 설치를 위하여 기초 사면의 호안을

철거 후 캔틸레버옹벽 기초 강관PILE항타 및 기존램프 기초를 철거하였음.

* 철거구간 제방 법면 토사 유실 방지 및 동부간선도로 안전을 위하여

2015년 수방계획에 따라 우기 전 “톤백+천막”을 설치하였음.

구 분		당 초	변 경	비 고
설계추가분 반영 (가시설공)	P.P마대쌓기및헐기	설계 반영	삭 제
	마대쌓기및헐기	설계 미반영	반 영
	PE천막지 설치
	흙쌓기
	흙헐기
	터파기(토사)
	pe연결관부설 및 접합
	PE관

○ 변 경 공 종

NO.	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
	P.P마대쌓기 및 헐기	45*70cm	㎥	1,634	-	1,634
	마대쌓기 및 헐기	Ton마대	㎥	-	875	875
	PE천막지 설치		㎡	-	5,132	5,132
	흙쌓기		㎥	-	4,256	4,256
	흙헐기		㎥	-	3,182	3,182
	터파기(토사)	인력+기계	㎥	-	419	419
	pe연결관부설 및 접합	D300mm	m	-	7	7
	PE관	300mm	본	-	1	1

○ 공사량 증 · 감 대비표

○ 공사비 증 · 감 대비표

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
	4. 구조물공	51,854	53,130	1,276
	4.04 옹벽공
	P.P마대쌓기 및 헐기	51,854	-	51,854
	마대쌓기 및 헐기	-	22,856	22,856
	PE천막지 설치	-	25,259	25,259
	흙쌓기	-	1,927	1,927
	흙헐기	-	1,543	1,543
	터파기(토사)	-	1,302	1,302
	pe연결관부설 및 접합	-	136	136
	PE관(300mm)	-	103	103
	직접공사비	51,854	53,130	1,276
	간접공사비	16,145	16,541	396
	도 급 액	67,999	69,671	1,672

[단위 : 천원]

○ 단가적용 현황

구  분

주 요 내 용

비 고

협의일자

○ 2015.05.11 계약당사자와 발주처 신규 단가 협의

증감수량

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법, 동 시행령, 동시행규칙 및

공사계약 일반조건 제20조 (설계변경으로인한 계약금액의 조정)②항

“계약대상자의 책임없는 사유”에 해당하므로 신규 협의단가 적용.

○ 단순 수량증감 공정은 공사계약 일반조건 제20조 (설계변경으로인

한 계약금액의 조정)①항1호에의거 계약단가 적용.

신규 비목

공 종	규 격	단위	산출가	협의율적용 (86.645%)	적용
마대쌓기 및 헐기	Ton마대	㎥	30,148	26,122	26,122

○ 신규단가 적용

적 용

□ 검 토 의 견

○ 동부간선도로 확장 및 노원교 진입램프 철거 구간에 대하여 기존 호안시설을

철거함에 따라 우기 시 제방법면 토사유실우려 및 동부간선도로 안전을 위함.

○ 2015년 수방계획에 따라 우기 전 토사 노출 제방법면을 보호코자 “톤백+천막” 을

사전 설치한 내용으로 정산 처리함이 타당한 것으로 판단됨.

검 토 자	동부간선도로 확장공사(3공구) 전면책임감리용역 책임건설사업관리기술자 김 구 환 (인)