문서번호	급수운영과-18490
결재일자	2015.9.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
손현정	이경희	전결 09/15 代이경희
협 조

기성부분검사(제1회) 시행 검토보고

「미성동 ********호간외 8개소 배급수관 정비공사 」

2015. 09.

남부수도사업소

급수운영과

기성부분검사(제1회) 시행 검토보고

우리사업소에서 시행 중에 있는「미성동 ********호간외 8개소 배급수관 정비공사」에 대하여 책임감독기관인 서울시시설관리공단으로부터 기성검사(감독)조서(제1회)가 접수되어 아래와 같이 검토 후 결과를 보고 드림

※ 관련공문 : 공사감독2처-14218(2015.09.09)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 미성동 ********호간외 8개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=20~300㎜, L=1,740m

○ 공사기간 : 2015. 04. 20. ~ 2015. 12. 24.

○ 계약금액 : 금511,459,350원

○ 수 급 자 : ****************

○ 감 독 자 : 서울시설관리공단  정우영

□ 보고내용

○「미성동 ********호간외 8개소 배급수관 정비공사」책임감독기관인 서울시시설관리공단으로부터 기성검사(감독)조서(제1회)가 제출됨

- 기성(제1회)요청 내용

∙ 계약금액 : 금511,459,350원

∙ 기성금액 : 금280,000,000원

∙ 기 성 율 : 54.7%

∙ 기성검사일 : 2015. 09. 07.

○ 검토내용

- 공사 감독기관에서 제출한「미성동 ********호간외 8개소 배급수관 정비공사」에 대한 기성검사(감독)조서(제1회)에 대하여 검토한 바, 주간구간으로 1구간, 5구간, 6구간, 7구간, 8구간, 9구간과 야간구간인 2구간이 완료된 상태로서 총 9구간중 7개구간 완료, 완료 공정 이내에서 요청한 사항으로 금회 기성금액을 계약상대자에게 지급가능함

- 기성 금액

계약금액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	계약잔액	비 고
511,459,350	0	280,000,000	231,459,350

□ 조치의견

○ 서울시설관리공단으로부터 제출된 기성부분검사에 대하여 검토한 바, 적정하게 산출되어 아래와 같이 공사 기성(제1회) 시행하고자 합니다.

- 공사기성(1회) 시행 현황

∙ 계  약  금  액 : 금511,459,350원

∙ 공 사 시 공 율 : D=20~300mm, L=1,166m 정비 완료

∙ 금회 기성 금액 : 금280,000,000원(기성율 : 54.7%)

∙ 기성후 잔여금액 : 금231,459,350원

붙 임 : 1. 기성검사(감독)조서(1회) 제출 1부.

2. 공사기성(1회) 내역서 1부.  끝.