문서번호	시설관리과-22676
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
한규수	고신석	09/18 우종근
협 조

기성부분검사(제1회) 시행 검토보고

「*************************************

2015. 09.

기성부분검사(제1회) 시행 검토보고

우리사업소에서 시행 중에 있는「*************************** 세척갱생관 정비공사」에 대하여 책임감독기관인 서울시시설관리공단으로부터 기성검사(감독)조서(제1회)가 접수되어 아래와 같이 검토 후 결과를 보고 드림

※ 관련공문 : 공사감독2처-14925(2015.09.18)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : *************************** 세척갱생관 정비공사

○ 공사개요 : D=20~300㎜, L=1,653m

○ 공사기간 : 2015. 05. 06. ~ 2015. 11. 01.

○ 계약금액 : 금 338,943,300원

○ 수 급 자 : **************

○ 감 독 자 : 서울시설관리공단 손성국

□ 보고내용

○「*************************** 세척갱생관 정비공사」책임감독기관인 서울시시설관리공단으로부터 기성검사(감독)조서(제1회)가 제출됨

- 기성(제1회)요청 내용

∙ 계약금액 : 금 338,943,300원

∙ 기성금액 : 금 174,372,000원

∙ 기 성 율 : 51.4%

∙ 기성검사일 : 2015. 09. 18.

○ 검토내용

- 공사 감독기관에서 제출한「*************************** 세척갱생관 정비공사」에 대한 기성검사(감독)조서(제1회)에 대하여 검토한 바, 야간구간인 1구간,  2구간이 완료된 상태로서 총 4구간중  2개구간 완료, 완료 공정 이내에서 요청한 사항으로 금회 기성금액을 계약상대자에게 지급가능함

- 기성 금액                                              (단위:원)

계약금액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	계약잔액	비 고
338,943,300	0	174,372,000	164,571,300

□ 조치의견

○ 서울시설관리공단으로부터 제출된 기성부분검사에 대하여 검토한 바, 적정하게 산출되어 아래와 같이 공사 기성(제1회) 시행하고자 합니다.

- 공사기성(1회) 시행 현황

∙ 계  약  금  액 : 금338,943,300원

∙ 공 사 시 공 율 : D=20∼300mm, L=1,068m 정비 완료

∙ 금회 기성 금액 : 금174,372,000원(기성율 : 51.4%)

∙ 기성후 잔여금액 : 금164,571,300원

붙 임 : 1. 기성검사(감독)조서(1회) 제출 1부.

2. 공사기성(1회) 내역서 1부.  끝.