문서번호	도로보수과-4082
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
홍수종	09/21 국중진

작업완료 보고서(제4차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업완료보고

□ 공사 일반현황

○ 공  사  명 : 2015년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공 사 개 요 : 소규모 포장복구 : 56a, 절삭후덧씌우기 : 152a

○ 공사기간 : 2015. 3. 10 ~ 2015. 12. 31

○ 착  공  일 : 2015. 3. 10

○ 준공예정일 : 2015. 12. 31

○ 도  급  자 : 정만건설(주)  박창엽

○ 도 급 비 : 601,176,180원

□ 보고현황

【4차】

○ 4차 작업지시

- 작업지시일 : 2015. 6. 18

- 작업지시내용 : 동대문구 제기동 817 앞외 4개소

(굴착복구A-1 : 1.61a, 차로단위복구 : 11.65a)

○ 작업완료 내용(4차)

- 작업완료일 : 2015. 7. 31

- 작업완료내용 : 제기동 817 앞외 3개소

(굴착복구A-1 : 2.25a, 차로단위복구 : 12.09a)

연번		위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
				폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
4-1		제기동 817 앞	A-1	2.5	7.0	17.5				사업취소
4-2	1	상봉동 128-12 앞	A-1	3.0	3.0	9.0	3.0	3.0	9.0
	2	중화동 451 앞	A-1	3.0	3.0	9.0	1.5	1.5	2.25
	3	망우동 534-17 앞	A-1	3.0	3.0	9.0	2.5	3.0	7.5
4-3		중곡동 21-1 ~ 28-1	A-1	1.2	10.0	12.0	1.2	8.0	9.6
4-4		용답동 472-3 앞	A-1	1.5	70.0	105.0	2.2~2.6	88.0	197.2
			평삭(A-1)	3.5	70.0	245.0	3.3~5.7	86.0	312.6
4-5		중곡동 230-14 ~ 230-1	평삭(A-1)	4.0	230.0	920.0	3.7~7.0	232.0	896.6
계									225.55 (1,209.2)

○ 작업현황

□ 조치사항

○ 위 내용과 같이 사업취소(1개소,한전) 구간을 제외한 복구 완료된 구간에 대하여       추후 설계변경에 반영하여 준공처리 하고자 합니다.

붙임 : 작업완료보고서 1부. 끝.