문서번호	치수과-3345
결재일자	2015.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		신용철	09/22 박상돈
협 조
	기획예산과장			박병현
	주무관			김태중
	주무관			박정태

「한강공원 나들목 증설 및 개선」

2015년 예산 집행 계획 보고

2015. 9.

한강사업본부(시설부)

「한강공원 나들목 증설 및 개선」

2015년 예산 집행 계획 보고

『한강공원 나들목 신설 및 개선』 사업의 원활한 추진을 위하여  『낙천정 나들목(신,구) 전기공사』 의 낙찰차액, 및  잔여예산 사용에 대한 검토 보고임

Ⅰ				공사개요		‘

○ 사업현황(4개소)

사 업 명	규 모(m)	계약금액	도급자	공사기간	비고
옥수나들목 신설 전기공사(2차)	지하보도 조명설비 설치1식 나들목 감시장치 설치 1식	129,383,180	㈜경알ENG	‘14.3.14~’‘15.5.18
낙천정 나들목(신,구) 전기공사	조명등(LED) 71등 설치 CCTV 7대 설치 및 배관배선	133,172,000	㈜종성테크	‘15.3.23~’15.9.30
낙천정 나들목(신구) 감시장치 구매설치	1식	69,297,310	㈜영국전자	‘15.4.3~’15.6.15
한강공원나들목증설및개선	나들목 설치 (옥수, 낙천정 , 신청담, 개화)	5,345,722,570	한양개발외 3	‘15.1.19~’15.12.20

Ⅱ				보고내용		‘

○ 한강공원 나들목 공사는 ‘13년부터 사업 시행중에 있으며, 서울시 재정여건상 부족한        예산배정으로 공정관리에 어려움이 있어, 동일 예산사업인 낙천정 나들목(신,구) 전기공사         낙찰차액 및 잔여예산이 있어 신청남나들목 공사에 사용하고자 함.

⇒  ’15년 요구액  10,050백만원,  배정액 7,150백만원,   부족액 2,900백만원

Ⅲ				사업별 예산배정계획		‘

사 업 명	‘15년 예산	지출액 (‘15.9.16현재)	향후지출액	추가소요액	비고
계	6,834,400,000	5,410,600,200	1,352,122,340	71,677,460
옥수 나들목	1,100,857,950	1,100,857,950	-	-
낙천정 나들목	2,423,023,800	1,797,158,980	625,864,820	-
신청담 나들목	2,509,385,160	2,311,432,180	126,275,520	71,677,460전기낙찰차액 : 25,146,380 잔여예산 : 46,531,080
나들목 전기공사	334,323,090	201,151,090	133,172,000	-
폐기물 처리용역	66,810,000		66,810,000	-
개화 나들목	400,000,000		400,000,000	-

○ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강접근체계개선, 한강나들목증설 및 개선,                  시설비 및 부대비, 시설비(100-401-04)

Ⅳ				조치계획		‘

○ 동일 예산사업인 나들목 전기공사 및 감시장치구매의 낙찰차액 25,146천원         및 한강공원 나들목 신설 및 개선사업의 잔여예산 46,531천원에 대하여        한강공원 나들목 증설공사(신청담)에 사용하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

○ 설계변경계획(안)

사 업 명	당초계약금액	변경계약금액	증‧감	비고
한강공원 나들목 증설공사(신청담)-3차	2,000,000,000	2,071,677,460	증 71,677,460

붙임 지출품의 현황 1부. 끝.