문서번호	도시철도사업부-8583
결재일자	2015.9.24.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	경전철계획과장	도시철도사업부장		시설국장
권순환	박용우	권영찬		09/24 형태경
협 조
	경전철2과장		최광무
	경전철1과장		박동룡
	주무관		박노성
	주무관		신익현

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』
통합 공정회의 개최 결과 보고(제7차)

2015. 9

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』
통합 공정회의 개최 결과 보고(제7차)

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업의 효율적인 관리와 원활한 사업추진을 위하여 제7차 통합 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘15.09.23.(수) 14:00~16:00

○ 장    소 : 도시철도국 회의실(10층)

○ 참 석 자 : 52명

- 본  부 : 도시철도국장, 도철사업부장․토목부장․건축부장․설비부장,
경전철계획과장, 분야별 담당과장 및 업무담당

- 사업자 : 법인대표, 건설사업단장, 운영관리팀장, 각 공구 책임감리원 및
현장소장(궤도 및 시스템분야 포함)

□ 회의결과

○ 보고현황

- 보고방법 : 회의 자료에 의거 각 공구 책임감리원이 보고

- 보고내용

· 분야별 공정 추진현황

· 현안사항 및 부진공정 만회대책

· 지시(협조)사항에 대한 조치결과 및 건의사항 등

○ 분야별 요구(협조)사항

<궤도분야>

- 우이1공구 L02환기구의 레일 및 자재 투입구를 15.11.15일 까지 유지 필요(방학연장선 자재 반입 시공 및 궤도공사 완료 후 가설자재 및 폐기물 반출)

- 우이3공구 L08정거장의 레일 및 자재 투입구를 15.11.30일 까지 유지 필요(가설자재, 장비, 폐기물 반출)

⇒ 우이1공구, 3공구에서 궤도감리단과 협의하여 조치

<시스템분야>

- 우이3공구 L10 변전실 조속한 시일내에 인도 요함(수전 일정 지연)

⇒ 우이3공구에서 조속 인도 조치

- 우이4공구 L13 신호통신 기능실 10월초 까지 협의(10월15일 장비 반입)

⇒ 우이4공구에서 시스템감리단과 협의하여 조치

- L02~L03정거장 사이 2번 자재 투입구 하선 궤도 궤광조립 조속 조치(9월말까지 조치)

⇒ 궤도공구에서 시스템과 협의하여 조치

- 방학연장 구간(400m)에 송변전 트라후(trough)가 지나갈 수 있도록 궤도공사 헌치 부분 기공사 구간(60m)에 대한 개선과 나머지 구간(340m)에  대한 자재정리 필요

⇒ 궤도공구에서 시스템 감리단과 협의하여 조치

- 우이1공구 3번환기구 토목공사 조속처리(원형광장 존치여부 자치구 협의 등)

⇒ 우이1공구에서 자치구 협의 등 공사 조속 추진

- PSD 설치일정에 차질이 없도록 승강장 연단부 및 두부정리 조속 시행

⇒ 우이1~4공구 및 궤도공구에서 마감 및 인계 조치

- 본선 환기실 출입문, 송풍기 기초패드 설계누락 사항 조속 조치

⇒ 우이신설경전철(주) 및 건설사업단에서 설계 반영 등 조치

○ 주무관청 및 법인 요구(협조)사항

<도시철도국장>

- 우이1공구 신우이교 민원사항에 대하여 적극적인 대처로 조속하게 해결해 주기 바람

- 2016.11.30. 개통을 목표로 적극적으로 공사를 추진하여 주기 바람

<도시철도사업부장>

- ‘15.10.23부터 연체금이 부과되므로 최대한 공정을 추진할 수   있도록 노력하여 주기 바람

- 차량반입에 따른 방호대책 등 안전대책 수립

- 현장에 안전사고가 없도록 신경써 주고, 추석연휴 대비 현장폐쇄가 확실히 될 수 있도록 조치

<도시철도토목부장>

- 우이1공구 방학연장 구간 궤도공사는 PSD설치에 지장이 없도록 ‘15.10.15까지 조치하고 나머지 구간은 ‘15.11.30까지 완료하겠음

<도시철도건축부장 >

- 건축분야 공정율 기준시점이 틀려서 건축공정율이 잘못되어 있으면 개선하여 주기 바람

- 우이3공구 일부 건축 공정마감이 ‘16.11.30까지 되어있으나 마스터 공정을 감안하면 ’11. 9월말까지 끝내야 하는 사항으로 개선이 필요함

<도시철도설비부장>

- 차량기지에 전동차 20량이 반입되어 있으므로 추석연휴때 방화,  도난 방지 등 안전관리에 철저를 기하여 주기 바람

<민우영 법인대표>

- 명절을 앞두고 공정관리를 위한 노력에 감사드림

- 내년 개통 목표를 달성하기 위하여 차량반입이 원활하게 되도록  협조해주셔서 현재 차량 36량 중 20량 반입 완료함

□ 향후계획

○ 금회 공정회의시 협조요청 및 요구사항은 각 분야(공구)별로  조치결과를 차기 공정회의 시 보고

○ 차기 공정회의는 현장에서 현장점검 후 실내 공정회의를 시행할 예정으로 일정계획 수립 후 각 부서 및 공구에 통보

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 통합 공정회의 사진 1부.