문서번호	설비부-11860
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 09/24 박기형
협조

『관악산 저류조 계측제어설비』

실정보고내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『관악산 저류조 계측제어설비』

실정보고내용 검토보고

『관악산 저류조 계측제어설비』와 관련하여 책임감리원으로부터 실정보고가 있어 검토 보고 드림.

구매개요

□ 건    명 : 계측제어설비 제작 구매(관악산 저류조)

□ 계 약 자 : ㈜싸이몬

□ 계약기간 : 2014. 5. 22 ～ 2017. 05. 30

□ 계약금액 : 351,054,000원

관련근거

□ 감리기술검토[도림(감)2015-126, 2015. 9. 23]

□ 빗물저류조 통합모니터링 시스템 연계 협조(하천관리과-11126, 2015.7.10)

주요 실정보고 내용

□ 빗물저류조 통합모니터링 시스템 연계를 위하여 관악구청 재난상황실 내에 통신변환 RCS시스템을 설치

□ 실시간 모바일 웹 감시장비는 보안성 문제 등으로 관악구청의 요청에 따라 불필요하므로 기존 계측제어설비 계약내역에서 삭제

계측제어설비 제작구매 변경 현황

구 분	단위	변경 전		변경 후		증 감	비고
		단위	금액	단위	금액
통신변환 RCS	식	1	0	1	438,045	증)9,417,523
실시간 모바일 웹개발	식	1	25,110,000	1	0	감)25,110,000
소 계						감)15,692,477
제경비(부가세포함)						감)1,500,523
총 계약금액			351,054,000		333,861,000	감)17,193,000

감리 검토 내용

□ 관악산 저류조 계측제어설비 현장여건 변경에 따른 시스템 구성 변경(저류조 실시간 모바일 웹 감시개발 삭제, CCTV와 통신회선 분리로 인한 변경)실정보고 검토결과 적정한 것으로 판단.

보고자 의견

□ 설계변경 실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인

□ 승인사항은 책임감리원에게 통보하여 추후 설계변경 시 반영될 수 있도록 조치하고자 함.

붙임  실정보고 공문 1부.  끝.