문서번호	급수운영과-18631
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이승우		09/24 최임봉
협 조
	주무관		이춘기
	주무관		공문수
	주무관		윤복철
	주무관		박종태

설계변경(1차) 심의위원회 개최「2015년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사」

2015. 9.

강남수도사업소(급수운영과)

설계변경(1차) 심의위원회 개최

「2015년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속)」에 대하여 사업소 자체 설계변경 심의 위원회를 개최하여 설계변경 시행코자 함

□ 설계변경 현황

❍ 공 사 명 : 2015년 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

❍ 공사개요

- 당초 : 노후밸브정비 139개소, 소화전정비 51개소, 기타 51개소

- 변경 : 노후밸브정비 139개소, 소화전정비 51개소, 기타 34개소

❍ 계약기간 : 2015.05.14 ~ 2016.04.30

❍ 도 급 비 : 금416,558,990원(변경 없음)

❍ 도 급 자 : 화진건설(주) 대표 박종섭

□ 심의위원회 개최

❍ 심의위원장 : 급수운영과장

❍ 심의위원 : 급수운영과 시설6급 박종태, 시설6급 공문수

시설관리과 시설6급 윤복철, 시설6급 이춘기

❍ 개최일시 및 장소

- 일시 : 2015. 9. 24(목) 14 : 00

- 장소 : 급수운영과

□ 심의내용

❍ 계약물량 증감 및 제경비 적정산정 여부 등 기타 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

- 신규공정 적정산정 여부

붙임 : 설계변경(1차) 요약 보고

설계변경(1차) 요약 보고

□ 공 사 명 : 2015년 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

❍ 공사개요 : 노후밸브정비 139개소, 소화전정비 51개소, 기타 34개소

❍ 계약기간 : 2015.05.14 ~ 2016.04.30

❍ 도 급 비 : 금416,558,990원(변경없음)

❍ 도 급 자 : 화진건설(주) 대표 박종섭

□ 설계변경 사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 인력터파기(용수,협소)공정 등 67개 공정

- 물량감소 : 아스팔트 포장철단(100~150mm) 공정 등 308개 공정

- 제경비 조정 : 물량 증ㆍ감에 따른 금액변경 7개 항목 발생

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 부단수 밸브교체공 (80mm) 등 23개공정

설계변경 내역                                     (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	416,558,990	416,558,990
공 급 가 액	378,689,991	378,689,991
부가 가치세	37,868,999	37,868,999

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.