설계변경(1차) 사전심의 요청서

접수번호	제 호

공사명	2015년 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

심의일시 : 2015. 9.

심의장소 : 급수운영과

강남수도 사업소

(급수운영과)

설계변경(1차) 사유서

공사개요

❍ 공 사 명 : 2015년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

❍ 공사규모 : 노후밸브정비 60개소, 소화전정비 20개소, 기타 24개소

❍ 계약기간 : 2015.05.14 ~ 2016.04.30

❍ 도 급 비 : 금416,558,990원(변경없음)

❍ 도 급 자 : 화진건설(주) 대표 박종섭

설계변경 세부내용 및 사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 인력터파기(용수,협소)공정 등 67개 공정

- 물량감소 : 아스팔트 포장철단(100~150mm) 공정 등 308개 공정

- 제경비 조정 : 물량 증ㆍ감에 따른 금액변경 7개 항목 발생

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 부단수 밸브교체공 (80mm) 등 23개공정

설계변경 내역                                     (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	416,558,990	416,558,990
공 급 가 액	378,689,991	378,689,991
부가 가치세	37,868,999	37,868,999

따로붙임 : 설계변경(최종) 내역서 1부.  끝.

심의위원회 의견

◦ "2015년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사(장기계속단가계약)" 설계변경(1차)에 따른 사전 심의 결과 다음과 같이 의견을 제시함

구 분	직 위	의 견	확 인
위 원 장	급수운영과장
위 원	급수운영과 공문수
위 원	급수운영과 박종태
위 원	시설관리과 이재윤
위 원	시설관리과 윤복철

2015. 9.