문서번호	물재생시설과-1392
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
박만헌		정훈모	09/25 代정훈모
협조
	주무관		강청금

시설비 집행계획 변경 승인요청 관련 검토 보고

2015. 9

물순환안전국

(물재생시설과)

시설비 집행계획 변경 승인요청 관련 검토 보고

㈜탄천환경에서 시설비 집행계획 변경 승인요청에 대하여 검토하고 아래와 같이 조치하고자 함.( ※ 관련 공문 : 탄천2015-444호, 2015.9.21)

요청개요

❍ 공종 변경

․ 정문 절개지 정비공사 추가공종(사면보강, 조경석 쌓기 등) 필요

※ 추가 사업비는 총인(3차)처리시설 설치사업 시행시 시행

❍ 사업비 변경 : (당초) 600백만원 → (변경) 900백만원

❍ 주요 변경내용

(금액단위 :백만원)

주요공종	당 초	변 경	증,감	비고(증감 사유)
계	600	900	증 300
토공(철거 및 암파쇄공)	66	150	증 84	토공량 증가 사토운반비 누락 등
풍화암 제거 및 운반 등
인공폭포 구조물공	116	380	증 264	풍화암 사면 보강
사면보강 및 조경석 쌓기
인공폭포 설비공	241	100	감 141	설비 공종 변경 (예산 절감)
부대공, 제경비	177	270	증 93	공사장 가림막 등

검토내용

❍ 정문 절개지 사면 정비공사 시행시 기존 암반 불량으로 사면

보강 등 추가 공종이 필요하나, 추가 예산 확보 필요한 실정임

(※ 붙임 벽천 설치계획 조감도 참조)

❍ 민원 해소 등 공사의 원활한 추진을 위해 추가로 소요되는 예산

은 총인처리시설 설치사업에 포함하여 시행하여 중복 투자를 방

지로 효율적인 사업 추진 필요

조치의견

❍ 원활한 공사 추진을 위해 계획중인 총인처리시설 설치사업에

포함되는 수문 설치공사비(300백만원)로 정문 절개지 사면정비

공사 추가공종을 집행하므로써, 조속한 공사 마무리 및 중복

투자 방지가 필요하다고 판단됨.

향후계획

❍ 2015. 9 : 시설비 집행계획 변경 승인 통보(탄천환경)

붙임 : 벽천 설치계획 조감도 1부.