소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-5342				담당자	전산운영팀장	전산통신과장	결재
				정석희	서용석	10/01 강경철
공정 내용	진척공정	60.23 %	진척주요추진사항
	금주공정	9.28 %	금주주요추진사항
금주 설치 작업 내용 o 단위 테스트를 위한 지령 서비스 업무 파악 o 종합상황판, 통계BI 서버 이관 작업 실패(원인: 복제를 한 ISO 이미지로 OS 설치 시 드라이브가 잡히지 않는 상황) o 지령DB 시스템 ASIS 시스템에서 TOBE 시스템으로 이관 시 고려사항 확인 및 이관 계획서 작성 o 지령서버#2에서 외장 스토리지 관련 메시지 발생하여 서버와 스토리지간의 케이블 재 포설 o 지령DB 시스템 테스트 마이그레이션중 TOBE 시스템에 import시 read error 발생(oracle사에 sr 오픈) o 지령 서비스 서/소 테스트 진행 -> 종로 119 안전 센터 : L4 switch를 사용한 대표 IP를 바라보게 단말기를 설정 하고 기타 2회, 구급 1회 실행하여 지령서비스 사이클 실행(테스트 성공) -> 회현/행당 119 안전 센터 : 회현 119 안전 센터는 지령AP서버#1의 IP로 설정, 행당 119 안전 센터 지령AP서버#2의 IP로 설정하여 동시에 화재3회, 구급 1회, 구조 1회, 기타 1회 실행하여 지령서비스 사이클 실행(테스트 성공) o 지령DB 시스템 테스트 마이그레이션중 TOBE 시스템에 import시 read error 발생한 사안 오라클 SR 진행 및 원인 분석 o 종합상황판, 통계BI 서버 이슈 사항 원인 분석 o 지령DB 시스템 테스트 마이그레이션중 TOBE 시스템에 import시 read error 발생한 사안 오라클 SR 진행 및 원인 분석 o 단위 테스트를 위한 지령 서비스 업무 파악 o 종합상황판, 통계BI 서버 이슈 사항 원인 분석 o 지령DB 시스템 테스트 마이그레이션중 TOBE 시스템에 import시 read error 발생한 사안 오라클 SR 진행 및 원인 분석하여 이슈 사항 처리(TOBE 시스템의 Pump Data 저장소를 Oracle ASM의 GPFS영역으로 이관하여 처리) - 총 3회 실시하여 이상 없음 확인종합상황판, 통계BI 서버 이슈 사항 원인 파악 o 지령DB 시스템 테스트 마이그레이션 이슈 사항 이관 테스트를 3회 실시하여 이상 없음 재확인

금주 투입 인원

o 전산운영팀 : 소방교 정석희

o (주)디엠아이시스템즈 : 이광용 차장, 최홍석 차장, 정연권 차장, 김태진 대리

o (주)인성정보 : 황선택 차장

o (주) 곧든디지털 : 이중철 부장, 고태완 사원

o (주)SM 인포메이션 : 장성순 차장, 김태웅 사원

현장대리인에게 지시사항

특기사항