투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	자원봉사스테이션 소통공간 조성에 따른 설비공사 변경 시행

1. 자원봉사스테이션 다목적 소통공간 조성 공사추진 계획(총무과-14205호, 2015.09.14)과 관련입니다.

2. 위 호에 의거 소통공간 조성관련 설비부분 공사 설계 검토 결과 공사내역 및 공사금액

이 변경되어 아래와 같이 변경 시행하고자 합니다

가. 설비공사 내역

○ 공사비 증가액 : 13,000천원

변경전 내역	변경후 내역	변경사유
○ 기계 · 설비 공사 : 10,000천원	○ 냉난방 및 급배수공사 : 총 23,000천원 - 냉난방시스템 설비 : 18,000천원 - 급배수 설비 : 5,000천원	○ 냉난방기 설치 추가 (2대→ 4대) ○ 급배수시설 신규 설치 공사비 증가

나. 예산과목 : 공원이용만족도향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전,

공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비

붙임 1. 자원봉사스테이션 다목적 소통공간 조성계획 1부.

2. 냉난방기 설치 내역서 1부.  끝.

주무관	임미경		총무과장	이경로		시설과장	공헌구		관리부장	10/14 심상원
협조자
시행	총무과-15682	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7991	/		/	부분공개