투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	조달물품 변경 요청(철근콘크리트용봉강, 남산 국궁장시설 개선공사)

1. 시설과-4338(2015.6.17.)호 및 공원운영과-11518(2015.6.19.)호와 관련입니다.

2. 남산 국궁장시설 개선공사와 관련하여 기 계약된 관급자재에 대하여 다음과 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 철근콘크리트용봉강 조달구매(남산 국궁장시설 개선공사)

나. 업 체 명 : 한국철강㈜  대표 장세홍

다. 변경사항

구분	품명	수량 (ton)	단가	금 액			식별번호
				품대계	수수료	합계
변경전	철근콘크리트용봉강, HD10	0.213	636,190	135,508	730	136,238	10063865
변경후	철근콘크리트용봉강, HD10	-	-	-	-	-	10063865
변경전	철근콘크리트용봉강, HD13	3.834	625,520	2,398,243	12,950	2,411,193	10063866
변경후	철근콘크리트용봉강, HD13	0.57	625,520	356,546	1,920	358,466	10063866
변경전	철근콘크리트용봉강, HD16	0.862	620,180	534,595	2,880	537,476	10063867
변경후	철근콘크리트용봉강, HD16	-	-	-	-	-	10063867
변경전	철근콘크리트용봉강, D16	-	-	-	-	-
변경후	철근콘크리트용봉강, D16	7.44	605,120	4,502,092	24,310	4,526,402	20160900

라. 변경사유 : 연습장휀스 옹벽 및 막구조물 기초변경에 따른 변경

붙임  변경보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	황윤채		조경팀장	남상국		시설과장	10/15 김한준
협조자
시행	시설과-7424	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231, 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5968	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개