투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	동절기 품질저하 및 안전사고 우려에 따른 공사 일시중지 요청

1. 우리시(사업소)에서 시행중인 "두모교 내진성능개선공사" 및 “홍제천고가교 내진성능 개선공사”는 정밀시공 및 안전이 요구되는 공사로서 동절기 공사를 추진할 경우 품질 및 작업자 안전관리 등 문제가 발생될 우려가 있어 동절기 기간동안 아래와 같이 보수공사를 일시 중지하여 품질 및 안전을 도모하고자 하오니 귀단 및 귀사에서는 현장관리 등 안전(화재예방 포함)에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 사업 : 두모교 내진성능개선공사, 홍제천고가교 내진성능개선공사

나. 공사중지 사유

- 동절기 혹한으로 인한 품질저하 및 작업자 안전사고 방지

다. 공사중지기간 : 2014. 1. 18 ~ 2014. 2. 28

단, 기온이 상승하여 작업이 가능하다고 판단될 경우 별도

작업지시할 계획임(현재 작업 진행중인 공종의 완료 예정일 ; 1.17)

라. 현장관리 : 기반입(제작)된 자재, 장비 등 품질관리 철저 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	신명기술공사(주) 대표 귀하,매일종합건설(주) 대표 귀하,나라로드(주) 대표 귀하
주무관	정상모		교량보수과장	구현모		서부도로사업소장	01/09 김만수
협조자	주무관	백운경
시행	교량보수과-164	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8451	/전송	300-8459	/	akma@seoul.go.kr	/	대시민공개