문서번호	공원녹지정책과-298
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
협 조

2014 시공원 보수정비사업 추진계획

2014. 1.

푸  른  도  시  국

(공원녹지정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014 시공원 보수정비사업 추진계획

자치구에 위임하여 관리하고 있는 시공원의 노후․훼손된 시설물을 보수하고, 산책로․배수로 등 기반시설을 정비하여 안전하고 쾌적한 시민 휴식공간으로 제공코자 함

Ⅰ
		공원현황

❍ 자치구 위임관리 시 공원 : 88개소 84.74㎢

- 도시자연공원 ------------- 19개소 61.22㎢

- 근 린  공 원 ------------- 65개소 23.26㎢

- 주 제  공 원 -------------   4개소  0.26㎢

Ⅱ
		사업개요

❍ 사업대상지 : 종로구 와룡근린공원 등 43개소

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 12월

❍ 사업내용 : 자치구 관리 시공원 노후시설물 보수정비 및 시설개선

❍ 추진방법 : 자치구별 설계심의 후 예산 재배정하여 사업시행

※ 시의원 지역건의사업에 대해서는 해당 시의원과 사전협의 후 사업시행

❍ 사 업 비 : 15,039백만원 (시의원 지역건의사업 15건 6,452백만원 포함)

사 업 명	사 업 비 (백만원)			비 고
	합 계	특별회계	일반회계
합 계	15,039,000	13,064,000	1,975,000	45건
시공원 시설물 보수정비사업	6,250,000	6,250,000		자치구 관리 시공원 정비-(25건)
주민참여사업	875,000		875,000	자치구 주민 참여사업 지원-(4건)
시의원 지역 건의사업	6,452,000	5,352,000	1,100,000	시의원 지역 건의사업-(15건) 현장시장실 건의사업-(1건)
유 보 금	1,462,000	1,462,000		시공원 긴급사항 등 정비 예비비

❍ 예산과목 : 총 예산액 15,039,000천원

- 도시개발특별회계(205-401-01) : 예산액 : 13,064,000천원

□ 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비

- 일반회계(100-401-01) : 예산액 : 1,975,000천원

1) 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 안산도시자연공원 어린이놀이시설조성(주민참여), 시설비 - (서대문구)

2) 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 초안산입구 등산로 등 노후시설 정비(주민참여), 시설비 - (도봉구)

3) 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 응봉산 수목식재 정비(주민참여), 시설비 - (성동구)

4) 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 인왕산도시자연공원 노후시설 정비(주민참여), 시설비 - (서대문구)

5) 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 북악스카이웨이 쉼터 및 산책로, 시설비 - (성북구)

6) 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 영등포공원 물놀이장 조성, 시설비 - (영등포구)

Ⅲ
		세부추진계획

기본 및 실시설계

❍ 설계시행 : 해당 자치구별로 설계시행

❍ 사전협의 : 시의원 지역건의사업에 대해서는 해당 시의원과 사전협의 후 사업시행

❍ 예산배정 : 사업비의 5~6%를 설계용역비로 재배정 (2014.1월)

❍ 설계기간 : 2014. 1 ~ 3월

❍ 설계기준

- 공원 전체적인 연차별 정비계획을 수립하여 공원시설별 색상이나 디자인의 통일성을 고려하여 설계하고, 토사유실지역, 배수로시설, 노후시설 등 시민안전 위험시설 우선정비

- 콘크리트, 철재, 보도블럭 등 인공구조물 설치 지양(숲에서 나는 재료를 가지고 숲을 치료)

- 생울타리 주변에 별도의 목책을 설치하거나 일부 훼손된 시설물을 전면 교체하는 등 예산낭비 요인이 없도록 시민의 입장에서 신중히 검토

- 여성 편익시설이나 장애인 전용시설은 여성․장애인 단체들과 사전협의하고, 합동현장점검 및 적극적인 의견수렴을 통하여 사후 불편이 없도록 조치

- 운동기구, 휀스 등 공원시설물 색상은『공원시설 색채 디자인 가이드라인』을 적용하여 기와진회색으로 설계

- 공원안내판은 개선된 『도시공원 안내체계』메뉴얼에 맞도록 설계

- 수목은 해당 지역의 기후, 토양 등 환경조건에 적합한 수종으로 선정

- 산책로 바닥포장은 가급적 인공시설인 황토색깔의 콘크리트 포장은 지양하고, 자연소재인 흙다짐 포장으로 설계

설계심의 요청

❍ 요청시기 : 설계완료 20일전

❍ 제출서류 : 설계심의요구서, PPT설명자료, 설계내역서 및 도면 각 5부

설계심의

❍ 심의시기 : 심의요청일로부터 7일이내

❍ 심의장소 : 푸른도시국 회의실

❍ 심의위원 : 5~6명(공원녹지정책과장 및 팀장)

❍ 사업설명 : 자치구 담당팀장

❍ 심의결과 : 심의시 제출된 의견은 설계에 반영하고 조치결과 제출

※ 조경공사 3억원 이상은 별도 계약심사 의뢰(서울시 계약심사과)

공사시행

❍ 봄철 식재적기에 나무를 심을 수 있도록 공사 조기발주

❍ 공원별 보수정비공사는 2014.11월까지 완료될 수 있도록 적극추진

❍ 착공보고서 : 공사착공 후 3일 이내 제출

❍ 준공보고서 : 공사준공 후 10일 이내 제출

Ⅳ
		추진일정

❍ 사업계획 시달, 자체 세부추진계획 수립 --- 2014. 1월

❍ 기본 및 실시설계, 설계심의요청 ---------- 2014. 2 ~ 3월

❍ 설계심의, 계약심사, 공사시행 ------------ 2014. 3 ~ 11월

붙임  1. 2014 시공원 보수정비사업 내역 1부.

2. 공사설계심의요구서 1부.

3. 공사착공 및 준공보고서 각 1부. 끝.