문서번호	물재생과-6943
결재일자	2015.10.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
박승필		강병수	10/22 김동기
협조
	주무관		정은경

2015년 수처리유지보수 단위사업계획 변경 보고

2015. 10

중랑물재생센터

(물 재 생 과)

2015년 수처리유지보수 단위사업계획 변경 보고

2015년 수처리유지보수 시설비 단위사업 중 수처리설비의 효율적 유지관리를 위한 사업내용 일부를 변경 추진코자 함.

Ⅰ		단위사업 변경대상

(단위 : 천원)

사 업 명	사업내용	사업예산	변경사유	비고
제3처리장 종침슬러지수집기 부품교체	제3처리장 A계열 6지 종침 슬러지수집기 레일 및 부품교체	210,000	’14년 집행잔액 사용 사업완료

Ⅱ		단위사업 변경사유

○ 제3처리장 종침 슬러지수집기 부품교체

- 2014년 집행잔액을 사용하여 사업완료

· 사업내용 : 제3처리장 A계열 종침 1~6지 교체완료

· 사업기간 : 2014.12.9. ~ 2015.2.17.

· 사업예산 : 165,757천원

Ⅲ		단위사업 변경내용

○ 『제3처리장 초침 슬러지수집기 부품교체』로 변경 시행

- 단위사업인 제3처리장 A,D계열 슬러지수집기(메탈→논메탈)부품교체 사업으로 전체 32대 대상중 D계열 14대가 교체 완료 되었으며 D계열 2대 및 A계열 16대가 미교체된 상태임.

- 슬러지수집기 논메탈 부품 교체 사업이 예산부족등으로 지연됨에 따라 고장시 수리기간 지연등 유지관리에 어려움이 있어 단위사업 변경에 따른 예산으로 슬러지수집기 부품교체 사업을 추가 진행코자 함.

○ 제3처리장 초침 슬러지수집기 현황

계 열	형 식	수 량	사업현황	비 고
A	메탈체인프라이트식	16	미교체	미교체 : 16대
B	논메탈체인프라이트식	16	교체완료
C	논메탈체인프라이트식	16	교체완료
D	메탈체인프라이트식	16	교체완료 : 14대 미교체 : 2대	미교체 2호,4호

○ 단위사업 추진 현황

- 2012년 D계열 2대 논메탈 부품 교체

- 2013년 D계열 4대 논메탈 부품 교체

- 2014년 D계열 4대 논메탈 부품 교체

- 2015년 D계열 4대 논메탈 부품 교체+(추가 3대 교체예정)

○ 변경 추진 계획

구 분	당 초 계 획	변 경 계 획	비고
사업내용	- 제3처리장 A계열 종침 1~6지 슬러지수집기 레일 및 부품교체 실시 사업예산 : 210,000천원	제3처리장 초침 슬러지수집기 D계열 2,4호 A계열 16호 부품 교체 실시 사업예산 : 260,000천원
변경사유	2014년 집행잔액을 사용하여 3처리장 종침슬러지수집기 부품교체 사업이 완료 됨

○ 예산집행 계획

- 제3처리장 초침 슬러지수집기 부품교체 : 260,000천원

· 제3처리장 종침슬러지 수집기 부품교체 (210,000천원)

· 수처리 유지보수 시설비 집행잔액 (50,000천원)

Ⅳ		추 진 계 획

○ 제3처리장 슬러지수집기 부품 제작구매 설치

- 계약방법 : 공개입찰(제한경쟁)

- 사업기간 : 계약일로부터 30일

- 사업내용 : 3처리장 오니수집기 3대 부품 교체

(A계열 16호, D계열 2호, 4호)

- 소요예산 : 260,000천원

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비

붙임 : 1. 2015년 물재생과 단위사업 발주계획 1부.

2. 2015년 예산설명서 1부. 끝.