소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-5857				담당자	전산운영팀장	전산통신과장	결재
				정석희	서용석	10/28 강경철
공정 내용	진척공정	100 %	진척주요추진사항
	금주공정	27.77 %	금주주요추진사항
금주 설치 작업 내용 o 신규 지령DB, 지령AP, GIS서버 이관 작업 실행(예정시간 14:00 ~ 16:00) - 15시 45분에 이관 완료 o 이관에 따른 대상 시스템 모니터링(~ 23:00) o 신규 지령 개발서버 DB 및 AP 이관 작업 o 신규 지령DB - DB 모니터링 소프트웨어 설치(맥스게이지) o 신규 녹취서버 이관 및 이중화 완료(녹취 솔루션 적용) o 이관에 따른 대상 시스템 모니터링(~ 23:00) o 신규 종합상황판 서버 이관 완료(아크로닉스 솔루션 적용) o 신규 연계서버 이중화 완료(MSCS 설치하여 이관) o 통계 DB 서버 이중화 완료(오라클 RAC 솔루션 적용) o NT서버 OS 백업을 위한 시만텍 백업 소프트웨어 설치 o 이관에 따른 대상 시스템 모니터링(~ 23:00) o GIS 서버 이중화 완료(L4 switch SLB 솔루션 적용) o 통계BI 서버 이관 완료(아크로닉스 솔루션 적용) o 검수를 위한 문서 작업 및 검수요청 문서 제출(서울시)
금주 투입 인원 o 전산운영팀 : 소방교 정석희 o (주)디엠아이시스템즈 : 이광용 차장, 정연권 차장, 김태진 대리, 송현수 대리 o (주)SM 인포메이션 : 장성순 차장, 이주현 사원 o 메타빌드 : 윤종훈 실장, 김주성 선임 o 골든디지털 : 오창민 대표, 이중철 부장, 고태완 사원 o 론스텍 : 이창협 대리 o 시큐어원 : 구덕우 과장 o 세아테크 : 변승용 사장, 김동근 대리 o 엑셈 : 김근태 대리 o 한국에스리 : 유명우 팀장, 김문현 사원
현장대리인에게 지시사항
특기사항