투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2015년 한강수중보 기전시설물 정비공사

1. 기전설비과-1614(2015.10.29.)호 관련입니다.

2. 「2015년 한강수중보 기전시설물 정비공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 한강수중보 기전시설물 정비공사
	계약상대자	주식회사 프렉매닉 (대표 : 전화숙)
	계 약 일 자	2015.04.13
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (감 7,400,000원), 계약기간 변경 없음
	변경사유	공사물량 증감분 반영에 따른 계약금액 변경
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.04.13	변경후 착공일자	2015.04.13
	변경전 준공기한	2015.10.31	변경후 준공기한	2015.10.31
금 액 변 경	변 경 전	*************
	변경금액	감 7,400,000 원
	변 경 후	************원

붙    임 :  1. 합의각서 1부

2. 설계변경내역서 1부

3. 변경계약의뢰서 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	10/29 이상국
협조자
시행	총무과-18324	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개