문서번호	물재생과-4507
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	김재봉	김일운	10/29 가길현
협 조

관급자재 납품기한 연기(스틸그레이팅) 보고

2015. 10.

난지물재생센터

(물재생과)

관급자재 납품기한(스틸그레이팅) 연기 보고

#2처리장 생물반응조에 설치된 콘크리트 덮개가 노후 되어 스틸그레이팅(관급자재) 구매 및 설치 작업과 관련 스틸그레이팅(관급자재) 설치 소요기간에 맞추어 스틸그레이팅(관급자재) 납품 기한을 연기코자 함

□ 구매개요

○ 건    명 : 관급자재(스틸그레이팅 구매 995×500)

○ 계 약 자 : ㈜가야스틸  대표 방은주

○ 계약금액 : 99,962,180원

○ 수    량 : 2,645개

○ 납품기한 : 2015. 10. 31.

□ 현황 및 문제점

○ #2처리장 생물반응조 콘크리트 덥개 하단 받침의 규격이 일률적이지 않아

○ 관급자재로 구매한 스틸그레이팅 규격[폭(995), 길이(500)]으로 설치시 생물반응조 콘크리트 덮개 하단 받침이 크고 작음으로 인해 그레이팅이 빠지고 또는 설치가 되지 않음

○ 콘트리트 덮개가 무겁고(1개 약50kg), 받침이 일률적이지 않은 관계로 그레이팅 설치 소요시간이 오래걸리고 있음

□ 조치계획

○ 관급자재 총 2,645개중 그레이팅 규격의 다양화로 우선 2,544개를 교체 중에 있으며,

○ 받침규격이 일률적이지 않은 관계로 설치 후 일부 규격이 상이한 자재에 대해 반품 및 신규 설치에 따른 시일이 필요한바

○ 관급자재 납품기한을 연기하여 그레이팅 설치에 만전을 기하고자 함

• 납품기한 연기 : 당초 2015. 10. 31 → 변경 2015. 11. 30.  끝.