문서번호	토목부-577
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
조양연	최순철	01/10 노우성
협 조

구로구 교통민원 교통영향 재분석 설계용역비 검토보고

(남부순환로(개봉역앞)구조개선공사)

2014. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

구로구 교통민원 교통영향 재분석 설계용역비 검토보고

(남부순환로(개봉역앞)구조개선공사)

『남부순환로(개봉역앞)구조개선공사』와 관련하여 구로구에 접수된 주민불편사항 및 개봉두산아파트 교통민원에 대하여 교통영향 재분석을 별도 전문기관(도로교통공단)에 의뢰하기 위한 설계 용역비 검토 보고임.

□ 사업개요

○ 위    치 : 구로구 개봉동 198-1일대 개봉역앞 남부순환로

○ 규    모 : 남부순환로 구조개선

- 지하차도 설치 : 폭 4차로 연장 : 736m

- 남⋅북측 측도 : 폭 2~3차로 연장 : 2,280m

○ 총사업비 : 58,597백만원

○ 공사기간 :  '07. 9. 10 ~ '14. 6. 30

○ 시 공 사 : (주)케이에스씨건설 60%, 대우조선해양건설(주 )40%

○ 감 리 사 : (주)동명기술공단 60%, (주)동일기술공사 40%

□ 교통 민원 접수 현황

○ '13. 7. 4 : 버스정류장 설치위치 및 운영계획 과 개봉고가하부 횡단보도 추가 및 개봉역앞 횡단보도 주민의견 수렴요구(구로구 교통행정과-23909호)

○ '13. 9.30 : 버스정류장-교차로-횡단보도 민원사항 포함 종합개선대책요구

(구로구 교통행정과-33485호)

○ '13. 10.17 : 개봉고가하부 횡단보도 추가 및 보행자 안전휀스 설치요구,

남측도로 버스정류장 남북간 분리방안 추가검토요구

(구로구 교통행정과-35440호)

○ '13. 10.25 : 횡단보도 당초 설계위치에 설치요구(한국남님외 60명)

(구로구 교통행정과-36530호)

○ '13. 10.25 : 개봉고가하부 횡단보도 추가(삼환아파트 입주자대표)

(구로구 교통행정과-36506호)

○ '13.11.15 : 교통민원에 따른 관련자(설계자, 비상주등) 대책회의 개최

(토목부-20993호)

○ '13.11.25 : 설계자(경화, 동명) 교통민원 검토의견 제출

○ '13.12.17 : 개봉두산아파트 개봉역방향 차로변경요구 및 아파트 후문에서 개봉역방향 진출요구 (두산아2013-61호)

○ '13.12.24 : 교통영향 재분석 실시설계비 견적가 접수

(설계사 경화, 동명외 교통안전공단 3개사)

□ 교통민원 내용

○ 버스정류장 설치위치 및 운영계획과 개봉고가하부 삼환아파트측 횡단보도 추가 및 개봉역앞 횡단보도 추가설치 주민 의견 수렴요구

○ 버스정류장 - 교차로 - 횡단보도 민원사힝 포함 종합 개선대책 요구

○ 남측도로 버스정류장 남북간 분리방안 추가 검토요구

○ 횡단보도 당초 설계 위치에 설치요구

○ 개봉두산아파트 후문에서 개봉역방향 차로변경(보도측) 통행 요구

□ 감리단 보고내용

○ 기본 및 실시설계 설계용역비 비교검토

구 분	도로교통공단 서울지부	경화엔지니어링	동명기술공단	비고
견적금액	25,000,000원	29,700,000원	35,000,000원	VAT포함
협의률적용 (82.868%)	20,000,000원	24,600,000원	29,000,000원
견적조건	- 횡단보도 신설 2면 - 버스정차대 위치조정 - 두산아파트앞 왕복차로 변경 검토 - 교통량 관련 시물레이션 검토 - 경찰청 규제도면 작성 - 주민 설명회 2회 ※ 견적가 산출근거 첨부
건의안	◎

○ 기본 및 실시설계용역비 품셈기준 산출 검토

* 산출근거 : 교통관련계획 표준품셈(2006.10 한국교통기술사협회)

구 분	기본 및 실시설계	비 고
품셈기준 산출 용역비	57,000,000원	VAT포함 일위대가 근거첨부

□ 조치계획

○ 「남부순환로(개봉역앞)구조개선공사」시행중 구로구로 부터 접수된 교통민원은 준공 단계에 계획된 교통처리계획은 주민들에게 불편한 부분이 많으므로 이를 전면 수정 및 보완해 달라는 민원으로

○ 설계시점(2006년)과 준공시점(2014년)의 편차가 심하여 당초 교통 설계자(경화) 의견에 따라 교통영향 재분석을 별도 전문기관에 의뢰하고자

○ 설계 용역비를 조사 검토한바 감리단 의견대로 도로교통공단 서울지부에 설계용역을 의뢰 조치 하고자 하며, 증액되는 설계용역비 20,000천원은 추후 토목 시설공사 설계변경시 반영 하고자 함.

□ 향후 추진 계획

○ '14. 1.15 : 교통영향 재분석 실시설계 업체선정 및 착수

○ '14. 2.28 : 주민설명회 개최(개봉2동 주민자치센타)

○ '14. 3.10 : 실시설계 준공 및 보고서 납품

○ '14. 6.30 : 차선도색, 교통안전시설물 설치완료

첨부 : 감리단 보고서 1부.  끝

2014.   1. 10.

지방시설(토목)주사  조  양  연