투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	시설공사 설계변경(총괄 10회, 8차2회) 및 준공기한 연기 계약의뢰(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

우리 본부에서 추진중에 있는 “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사”에 대하여 현장여건 변동으로 인한 설계변경(총괄 10회, 8차2회) 및 민원 발생 등 절대공기 부족으로 인하여 준공기한 연기 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사(총괄10회, 8차2회)

나. 공사개요 : 지하차도 4차로, 연장 736m

다. 도 급 자 :㈜케이에스씨건설외 1사

라. 설계변경 계약 의뢰 내역

1) 계약금액 변경

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 괄 10회	46,568,588,000	48,804,866,000	(증)2,236,278,000
8차분 2회	5,314,934,000	7,551,212,000	(증)2,236,278,000

2) 설계변경(총괄 10회, 8차2회) 사유

○ 총괄10회 : 가설사무실 및 살수차 운영기간 연장 등 실정보고 승인(23건) 및 설계변경소위원회 자문결과(9건)에 따른 설계변경, 물가변동에 따른 계약금액 조정(제1~6회) 정산 반영

○ 8차 2회  : 총괄10회 변경분 반영에 따른 공사비 변경

마. 준공기한 연기 계약 의뢰 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총괄 10회	‘07.09.10. ~ ‘15.10.31.	‘07.09.10. ~ ‘15.12.10.	증)40일
8차분 2회	‘14.03.31. ~ ‘15.10.31.	‘14.03.31. ~ ‘15.12.10.	증)40일

붙임 : 1. 설계변경(총괄 10회, 8차2회) 및 준공기한 연기 검토보고 방침 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부(별도송부).

3. 예정공정표 및 관련공문 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	진재섭		토목부장	10/30 노우성
협조자	경리과장	박환
시행	토목부-22860	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2556	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개