[별지 제32호서식] <개정 2013.3.23>					(앞쪽)
			□ 하천점용허가기간										처리기간
									연장신청서
													5일
			□ 하천예정지 안에서의 행위허가기간
			□ 홍수관리구역 안에서의 행위허가기간
신청인	①성 명 (법인의 명칭)			서울특별시 서부도로사업소 (교량보수과)	②주민등록번호(법인은 대표자의 성명 및 주민등록번호)					110-83-01032
	③주 소			서울특별시 마포구 가양대로 203			④전화번호			300-8452
⑤허가연월일 및 번호				2013년 9월 6일(제2013-33호)
⑥점용(행위)위치				서울시 마포구 망원동 303-6일대(성산3램프 AP0~AP6)
⑦점용(행위)내역				홍제천고가교내진성능개선공사를 위한 작업대(비계)설치		⑧점용(행위)면적					126㎡
⑨점용(행위)기간				2013년 9월 6일부터 2014년 1월 14일까지(131일간)
⑩연장기간				2013년 9월 6일부터 2014년 3월 31일까지(207일간)
⑪연장사유				공사기간 연장에 따른 점용기간 연장
「하천법」 제33조제1항(제38조제1항)과 같은 법 시행규칙 제19조제3항(제20조제2항)에 따라 위와 같이 하천점용허가기간(하천예정지/홍수관리구역 안에서의 행위허가기간)의 연장을 신청합니다. 2014년 1월 13일 신청인 서부도로사업소장 (서명 또는 인) 한강사업본부장 귀하
첨부서류: 없음												수수료
												없음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.				(뒤쪽)
신청인				처리기관
				국토교통부, 지방국토관리청, 특별시·광역시·도·특별자치도
	신청서 작성				▶	접수
				▼
						검토
				▼
						결재
				▼
						대장정리
				▼
	허가증 발급	◀				허가증 작성