문서번호	시설과-226
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리부장
김형집		이윤권	01/13 정상택
협조
	시설과장		공헌구

공동구내 관로(난방배관 등) 점검용역 추진계획

2014년 1월

서 울 대 공 원

【시설개선안전추진반】

공동구내 관로(난방배관 등) 점검용역 추진계획

◇ 노후화된 대공원 기반시설의 근원적 대응을 위한 『중·온수, 소방    및 소방배관』개량방안 마련

◇ 배관 부식으로 인한 누수로 동물사 난방중지등 안전사고를 사전에

예방코자 관로(난방배관등) 점검용역 추진계획을 수립 시행코자 함

Ⅰ		현 황

설치년도 : 1984년

공동구 연장 : 9.16Km

수용시설

— 상수도관 : 14.7Km(15 ~ 300mm), 2007년 교체완료

— 중․온수관 : 13Km(25 ~ 200mm)

— 소화배관 : 10Km(50 ~ 100mm)

— 잡용수배관 : 8.5Km(15 ~ 400mm)

Ⅱ		소요예산

소요예산 : 22,000천원

예산과목 : 일반회계, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비

Ⅲ		추진방향

노후화된 관로(중온수관 등)의 물리적 또는 기능적 결함 조사

비파괴검사 및 재료시험등 조사결과에 따른 안전성 평가

관로에 대한 사용성 및 경제성등에 의한 보수․보강방법 제시

Ⅳ		추진계획

추진일정

- 2014. 1 : 기술용역타당성심사 요청(기술심사담당관)

- 2014. 1 : 점검용역 발주 및 계약

․ 계약방법 : 수의계약

- 2014. 2 ~ 3 : 점검용역 착수 및 완료

․ 2014. 3 : 점검용역 완료보고회 개최

점검용역 주요내용

— 관로별 부식 및 노후화등 상태 육안검사

— 관로별 강도 및 비파괴시험(초음파 검사)등 재료시험

— 재료의 검사 및 시험결과에 따른 사용성 및 잔존연한 평가

— 배관의 중요도, 사용조건, 및 경제성 등에 따른 보수․보강방법 제시

— 배관의 우선순위에 따른 년차별 사업계획 및 개략공사비 제시 등

Ⅴ		향후계획

점검용역 결과에 따른 배관 개량범위 및 사업 우선순위 결정

소요사업비(30억원 이상) 과다시 투자심사후 사업예산 확보

— 2014. 5월 : 투자심사 의뢰

— 소요사업비 2014년 추경 반영 요청

사업예산 확보후 실시설계용역 시행

— 2014년 하반기 : 실시설계용역 시행