투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	지하철 918공구 건설공사 계약변경 의뢰(5차 2회)

1. 도시철도토목부-311(2014.01.09)호와 관련입니다.

2. 『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사』의 국비예산 일부 미교부에 따라 사업추진과 예산집행의 효율을 기하기 위하여 계약물량을 조정하여 공사를 추진하고자 계약변경(5차 2회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

나. 공사구간 : 송파구 잠실동 아시아선수촌 아파트 앞 ~ 삼전동 (구)잠실병원 앞

다. 시 공 자 : SK건설 대표 윤석경 외 4

라. 감 리 자 : (주)서영엔지니어링 대표 이언기 외 3

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

바. 계약변경 의뢰내용

(단위 : 천원)

구 분		총 괄	5 차	비고
계약금액	당초	137,676,997	21,399,000
	변경	137,676,997	19,196,000
	증․감	변경없음	감 2,203,000
공사기간	당초	’10.02.19 ～ ’16.02.17	’13.01.28 ~ ’14.01.20
	변경	변경없음	변경없음

사. 계약변경 사유 : 국비 미교부(감 2,203,000천원)에 따른 물량 변경

첨    부  : 1. 계약금액 조정 검토보고서 1부.

2. 감리 검토의견서 1부.

3. 변경 내역서(5차) 1부.   끝.

	도시철도토목부장
주무관	엄태용		9호선1과장	김성호		도시철도토목부장	01/13 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-451	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 서울시청 남산별관 4층 도시철도토목부	/
전화	02-772-7212	/전송	02)772-7306	/	seoulite04@seoul.go.kr	/	대시민공개