문서번호	설비부-453
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김은덕		권오식	01/14 박기형
협조
	경리과장		최영미

『잠원2빗물펌프장 신설 전기공사(1차)』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01.

도시기반시설본부

(설비부)

『잠원2빗물펌프장 신설 전기공사(1차)』

준공기한 연기 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인 『잠원2빗물펌프장 신설 전기공사(1차)』 준공기한 연기 신청이 있어 검토한 결과임

공사개요

공사명 : 잠원2빗물펌프장 신설 전기공사(1차)

도급액 : 금100,000,000원(총차 : 금539,547,490원)

준공기한 : 2014. 2. 20.(총차 : 2014. 6. 30.)

시공사/ 감리 : 등전전기(주)외 1개사/㈜신명건설기술공사

관련근거

잠원2감 2014-19호(2014.1.13.) ‘잠원2빗물펌프장 전기공사 공기연장 검토 보고

검토내용

주요내용 : 잠원2빗물펌프장 신설 전기공사(1차) 준공기한 연기

변경내용

구 분	공사기간		비고
	당 초	변 경
1차	2013.3.26.~2014. 02. 20.	2013.3.26.~2014. 06. 30.	증)130일

※ 공사금액 변경 없음

연기사유 : 토목공사 1차분 준공기한 연장 및 토목 공정 지연으로 전기공사 준공기한 연기

지체상금 부과 여부 : 미부과

검토의견

토목공정 지연에 따라 전기공사 준공기한 연기가 불가피한 사항으로서,

감리단 의견이 타당한 것으로 판단되어 검토 내용과 같이 공사 준공기한을 연기 조치함이 적합하다고 봄

행정사항

경리부서(본청 재무과)에 준공기한 연기 의뢰

붙 임 : 책임감리원 준공기한 연기 요청서 1부.  끝