투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰[율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 전기공사]

우리본부에서 시행중인 『율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 전기공사

나. 공사기간 : 2014. 5. 15. ~ 2017. 12. 31.

다. 계약업체 : 아람이앤테크(주)

라. 설계변경 내역

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 감
총 차	1,132,733,500	1,160,535,200	증)27,801,700	계약기간 변경없음
1 차	224,862,000	224,862,000	-

마. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별), 율곡로(창경궁앞) 도로구조개선, 시설비.

붙임  1. 설게변경보고 및 감리실정보고 각 1부.

2. 도면 및 내역서 각 1부.

3. 제비율 검증 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	신정규		녹색성장과장	김창균		설비부장	전결 11/19 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-14510	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개