문서번호	방재시설부-15568
결재일자	2015.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김재무		신용우	11/20 임춘근
협조	치수시설과장		代이병환
	주무관		이병환

잠원2 빗물펌프장 신설공사 조경사항 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

잠원2 빗물펌프장 신설공사

조경사항 실정보고 검토

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『잠원2 빗물펌프장 신설공사』와 관련 주민요구사항을 반영하여 당초 완전유역분리방식(강제토출방식)에서 가동식유역분리방식(자연방류관로)으로 사업변경됨에 따른 신사근린공원 복구 등 조경변경사항에 대한 감리단 실정보고사항 검토 보고임

- 관련근거 : 잠원2감 2015-91호(2015.11.18.)

□ 공사개요

○ 위    치 : 강남구 압구정로 11길~현대고~한강

○ 규    모 : 펌프장 Q=1,400㎥/분, 유출입관로 640m, 수문 3개소,

신사공원복구 등

- 조경공사 내용(전체공정율 8%)

· 수목 제거 : 양버즘나무 등 10종 307주(완료)

· 수목 이식 : 소나무 등 10종 215주(완료)

· 신사공원 복구 : 교목 74주, 관목 8,970주, 초화류 7,000본,

파고라 1동, 포장공 1,424㎡ 등

· 완충녹지 복구 : 관목 2,758주, 초화류 12,600본,

목재트랠리스 2개소, 포장공 335㎡ 등 등

○ 사업기간 : 2013. 1. 3 ~ 2016. 12. 31

○ 도 급 비 : 139억원(조경 342백만원)

○ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사 외 1개사

○ 시 공 사 : 에스트건설(주)

□ 실정보고사항(조경)

○ 검토 경위

- 완전유역분리방식(강제토출방식)에서 가동식유역분리방식(자연

방류관로)으로 사업변경됨에 따른 신사근린공원 및 완충녹지

원상복구에 대한 조경변경사항으로

⇒′15.07.01.  사업변경에 따른 주민설명회(신사동주민센터)

′15.10.02.  관로설치 단계별 일정 및 신사공원(완충녹지)

복구(안)에 대한 주민설명회(신사동주민센터)

⇒ 신사공원 및 완충녹지 완전 복구를 요구함

○ 검토 내용

- 주요변경 사항

구 분	실정보고내용	검토의견
교 목	소나무외 12종 494주 → 소나무 외 21종 704주	주민요구사항 반영한 복구안 으로 적합
관 목	회양목 외 9종 10,782주 → 회양목외 11종 19,788주
초화류	구절초 외 6종 19,600본 → 맥문동 외 6종 18,600본
지피류	잔디 7,576㎡ → 잔디 5,968㎡
시설물	파고라, 계단 등 10종 → 육각정자, 트랠리스 등 11종
포장공	투수블럭 등 4종 2,006㎡ → 투수블럭 등 5종 3,288㎡

- 물량변경 내역 : 붙임

□ 공사비 변경내역(조경)

(단위:천원)

구 분	금 액		증 감
	당 초	변 경
직접공사비	342,057	778,864	+436,807
제경비	129,768	268,261	+138,493
임목폐기물	5,175	5,175
공급가액	477,000	1,052,300	+575,300
부가가치세	47,700	105,230	+57,530
도급공사비	524,700	1,157,530	+632,830
관급자재비		180,644	+180,644
총사업비	524,700	1,338,174	+813,474

□ 검토결과

○ 잠원2 빗물펌프장 현장여건의 변동에 따른 식재수량 및 시설물 변경사항으로 감리단 실정보고사항을 승인하며 향후 설계변경시 반영하여 설계변경토록 책임감리원에게 통보하고자 함.

붙 임 : 1) 물량변경내역 1부

2) 실정보고 검토의견서 1부.  끝.