문서번호	설비부-14780
결재일자	2015.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 11/23 박기형
협조

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』

실정보고(조명기구 수량변경 건) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』

실정보고(조명기구 수량변경 건) 검토보고

『한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사』 현장의 실정보고에 대한 감리보고가 있어 검토 보고 드림.

공사개요

□ 건    명 : 한양도성 인왕지구 외 1개소 경관조명 설치공사

□ 계 약 자 : 성제전기(주)

□ 계약기간 : 2015. 9. 7 ～ 2015. 12. 31

□ 계약금액 : 533,953,520원

관련근거

□ 현장상황 실정 검토결과 보고[동원15-33, 2015. 11. 23]

실정보고 주요내용

□ 경관조명 연출 극대화를 위한 조명기구 수량 변경

□ 군부대 요청사항에 따른 인왕지구 폴 타입 변경

공사비 증감 현황

구 분	금 액(원)			비고
	변경 전	변경 후	증 감
남산 조명기구 설치	56,348,470	56,423,621	증)75,151	직접 공사비
폴 설치(인왕지구)	38,973,338	32,931,601	감)6,041,737
자재 및 필터 설치	80,834,464	60,824,678	감)20,009,786
합계	176,156,272	150,179,900	감)25,976,372

조명기구 수량변경 현황

구분	변경사유	규 격	수량변경			비고
			당초	변경	증감
인왕지구	간격조정을 통한 수량변경	LED 20W	144	165	증11
	정상부 4구역 추가설치	LED20W(석재외함)	3	22	증19
남산지구	간격조정 및 미설치구간 삭제	LED20W(AL압출)	92	105	증13
		LED20W(석재외함)	108	132	증13
		LED15W(석재외함)	148	131	감18
		LED7W(지중등)	117	119	증2

폴(POLE) 및 사급자재 수량변경 현황

구 분	변 경 사 유	규 격	수량변경			비고
			당초	변경	증감
폴(POLE)	군부대 요청사항	5M	9	0	감9	관급
		4M	15	0	감15
		3.0M	0	1	증1
		2.5M	3	1	감2
		2.0M	14	1	감13
		1.5M	0	15	증15
		1.3M	4	0	감4
		1.0M	12	49	증37
		0.7M	4	0	감4
		0.5M	59	98	증39
감소필터	높은폴 타입을 낮은폴 타입으로 변경시 불필요		144	0	감144
Barn door			38	0	감38

감리 검토의견

□ 경관조명 설치효과 극대화를 위하여 조명기구 및 폴의 수량 변경과 군부대의 요청으로 높은 폴에서 낮은 볼라드로 변경 시공함으로서 필터 및 Barn door는 불필요하여 삭제함이 적절하다고 판단됨.

보고자 의견

□ 실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인

□ 승인사항은 감리원에게 통보하여 추후 설계변경 시 반영될 수 있도록 조치하고자 함.

붙임  현장상황 실정 검토결과 보고 각 1부.  끝.