문서번호	토목부-24852
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		서관석	11/24 代서관석
협조	주무관		오열상
	주무관		장기철

지장물 철거 누락분 반영 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2015.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

지장물 철거 누락분 반영 검토보고

남단구간 램프-C에 저촉되는 지장물(근린생활시설) 철거가 도급내역서에 누락되어 반영코자 검토 보고하는 사항임.

공사개요

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2020. 8.31.

❍ 도 급 액 : 176,766백만원

❍ 시 공 사 : 삼성물산㈜ 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

관련근거

❍ ‘15.11.16. : 지장물 철거 실정보고(감리단→도기본, 월드컵(감리)-464호)

보고내용

❍ 검토배경 : 남단구간 램프-C에 저촉되는 지장물(근린생활시설) 철거 물량이 도급내역에 누락되어 반영코자 하며, 지장물 철거 시 발생하는 폐기물(폐콘크리트, 폐아스콘)도 함께 처리코자 함.

❍ 위치도 및 현장사진

❍ 공사비 검토

구 분		단위	당 초	변 경	증·감	비 고
공사내역	폐기물상차	ton	3,171	4,788	증)1,617
	방진망 설치 및 해체	m	-	120
	콘크리트깨기	㎥	419	560	증)141
	건물 철거	㎥	-	274
	아스팔트깨기	㎥	2,748	3,164	증)416
	석면조사	식	-	1
	기타	식	1	1
공사비		천원	139,500	187,500	증)48,000

검토의견

❍ 당초 설계 시 누락된 지장물(근린생활시설) 철거에 대한 내역 반영이 필요하며, 지장물 철거 시 발생하는 폐기물도 함께 처리하는 것이 타당하다고 판단됨.

조치계획

❍ 상기 검토내용과 같이 검토한 바, 적정하여 우선 시공토록 지시하고 향후 설계변경 시 반영하여 처리코자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.