(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2015. 11
공 사 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	월드컵대교 남단구간내 지장시설물 철거 실정보고

▢ 공사개요

○ 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

○  개    요 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○  도 급 액 : 176,766백만원

○  공사기간 : 전체 : 2010.03.22.~2020.08.31(126개월)

○  시 공 사 : 삼성물산(주)외 2개사

○  감 리 사 : (주)포스코엔지니어링외 1개사

▢ 검토내용

월드컵대교 남단구간 R-C(토공)에 저촉되는 지장물(진부좋은고기)철거와 관련     하여 영등포구청과 기 협의되고 석면용역 발주가 되어 근린생활시설 철거 검토.

(해당폐기물 : 폐콘크리트, 폐아스콘, 혼합건설페기물, 석면등)

▢ 관련근거

□ 삼건월드컵 2015-504호(2015.11.11.)-시공사→감리단

-월드컵대교 남단구간내 지장물 시설(진부좋은고기)철거 실정보고

□ 월드컵(감리)2015-   호(2015.11.16.)-감리단→발주처

-월드컵대교 남단구간내 지장물 시설(근린생활시설)철거 실정보고

▢ 공사 위치도

▢ 공사비 현황

(단위:천원)
구 분	공 종	단위	당 초		변 경		증 감		비 고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
폐기물상차	폐콘,폐아스콘 혼폐	ton	3,171	2,063	4,788	3,491	1,617	1,428
방진망 설치 및 해체		m			120	9,795	120	9,795
건축물철거	압쇄기	㎥	419	16,607	834	31,230	415	14,623
아스팔트깨기		㎥	2,748	103,716	3,164	119,258	416	15,542
기 타	보도블럭 경계석	식	1	4,433	1	6,280	1	1,847
석면조사용역비						400		400
공 사 비 계				126,819		170,454		43,635
부가가치세				12,681		17,046		4,365
합 계				139,500		187,500		48,000

▢ 폐기물 수량 산정

□ 건축물(A=405㎡)

구 분	단 위	원단위 『구조물 해체공법에 관한 연구(1996.06월)』	면적(405㎡) x 원단위	비 고
		스라브 (㎥/㎡)
철근콘크리트	㎥	0.19281	78	폐콘:141㎥ (324 ton)
무근콘크리트	㎥	0.15617	63
블 럭	㎥	0.33343	135	혼폐:274㎥ (469 ton)
벽 돌	㎥	0.20845	84
스 레 트	㎥	-
기 와	㎥	-
목 재	㎥	0.02629	11
기 타	㎥	0.10827	44
계		1.02542	415

□ 기초 구조물(바닥 등)

구 분	단 위	수 량		비 고
		산 출 근 거	계
폐아스콘	㎥	1,388㎡ * 0.3m =	416	폐아스콘: 957 ton
보도블럭	㎥	200㎡ * 0.07m =	14	혼합폐기물: 50 ton
경 계 석	㎥	384m * 0.04㎡ =	15
수 목	ton	조사중		별도보고

▢ 실정보고 사유

남단구간 R-C(토공)에 저촉되는 지장물(진부좋은고기)철거와 관련하여 영등포     구청과 기 협의되고 석면용역 발주가 되어 철거 검토.

▢ 단가적용 검토

상기 공종은 누락된 공사량의 증가건으로 공사계약일반조건 제20조1항에 의     거 기계약 단가(낙찰율 64.008%)적용함.

▢ 검토의견

남단구간 R-C(토공)에 저촉되는 근린생활시설 지장물 철거(폐콘크리트, 폐아스     콘, 혼합건설페기물, 석면 등)와  관련하여 영등포구청과 기 협의되고 석면용역

발주가 되어 근린생활시설물을 철거하는 것이 옳은 것으로 사료됨.