문서번호	방재시설부-15717
결재일자	2015.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
조양연		윤방식	11/24 임춘근
협조

유입·초기우수관로(B구간) 공사비에 대한 검토보고

(중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

유입·초기우수관로(B구간) 공사비에 대한 검토보고

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 유입 및 초기우수 유입관로  (B구간) 공사 “노선변경 승인(방재시설부-9698호, 2015.7.12.)” 에 따라 제출된 공사비에 대한 계약금액조정 적정성 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

◦ 방재시설부-9698호(2015.7.21.) : 실정보고(노선변경) 승인사항 알림

◦ 한종(중랑)감제15-391호(2015.11.12.) : 시설현대화 유입관로(B구간) 실정보고 공사비 검토보고

Ⅱ		사업 개요

◦ 위    치 : 서울시 성동구 자동차시장 3길 64 (송정동, 중랑물재생센터)

◦ 규    모 : 고도처리 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일 등

◦ 사업기간 : 2009. 2. 13 ~ 2016. 2. 28

◦ 총사업비 : 339,143백만원(도급액 322,005백만원)

◦ 시공사/감리사 : (주)한국종합기술 외 1 / GS건설(주) 외 3

Ⅲ		감리 보고 내용

◦ 시설현대화 유입관로(B구간) 노선변경 실정보고 현황

당 초	변 경	증 감
○ 비개착(강관압입) ․ 하 수 (D1800) L=31.0m ․ 초기우수 (D2200) L=31.0m ○ 개착(SHEET PILE) ․ 하 수 (D1800) L=260.6m ․ 초기우수 (D2200) L=229.0m ● 합 계 ․ 하 수 (D1800) L=291.6m ․ 초기우수 (D2200) L=260.0m	○ 비개착(강관압입) ․ 하 수 (D1800) L=132.0m ․ 초기우수 (D2200) L=100.2m ○ 개착(추진,연결구) ․ 하 수 (D1800) L=33.3m ․ 초기우수 (D2200) L=45.7m ● 합 계 ․ 하 수(D1800) L=165.3m ․ 초기우수(D2200) L=145.9m	○ 하 수(D1800) L=126.3m 감 ○ 초기우수(D2200) L=114.1m 감

Ⅳ		감리 검토 의견

□ 공사비 변경은 증감합산하여 계약금액 조정없음

◦ 공사비 변경은 입찰안내서 제7장 공사계약일반조건 제21조 ⑥항에 의거   “증감합산하여 계약금액을 증액할 수는 없다.”를 적용함이 타당하다고 판단됨.

□ 구조물 및 가시설 구조 검토 적정함

◦ 노선변경 구간의 구조물 및 가시설 구조검토 부분은 기술지원감리원의 검토 보완사항과 감리단 검토의견을 반영하여 적정하다고 판단됨.

□ 관내 협잡물 퇴적 최소화 방안 추후 반영 예정

◦ 유입부를 #4처리장 침사지로 변경시 협잡물의 관내 퇴적의 최소화에 대한 (침사지 스크린설비 설치,보수 기계설비부분) 유지관리기관 협의는 설비분야에서 진행중임.

□ 공사비 증감 현황

구분	공 종	공 사 비(천원)
		당초	변경	증감액
전체	가.순공사비	7,449,060	7,994,471	545,411
	나. 제경비	2,442,940	2,870,284	427,344
	라. E/S	0	-726,755	-726,755
	마. 총공사비	9,892,000	10,138,000	246,000
기시공 + A구간	가.순공사비	4,248,081	5,664,082	1,416,001
	나. 제경비	1,395,919	1,961,625	565,706
	라. E/S	0	-326,707	-326,707
	마. 합계금액	5,644,000	7,299,000	1,655,000
B구간	가.순공사비	3,200,980	2,330,389	-870,590
	나. 제경비	1,047,020	908,659	-138,362
	라. E/S	0	-400,048	-400,048
	마. 합계금액	4,248,000	2,839,000	-1,409,000

Ⅴ		조 치 의 견

◦ 상기 감리 보고 내용을 검토한바 적정한 것으로 판단되므로 유입관로(B구간)의 도급비 감1,409백만원(전체분 증246백만원)은 추후 설계변경에 반영하여 증감합산 처리하고,

◦ 관내 협잡물 퇴적의 최소화를 위한 침사지 스크린설비의 설치 여부는 설비분야에서 진행중인 유지관리기관 협의결과에 따라 조치코자 함.

붙임 : 감리단 검토보고서  1부.  끝.