투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	지하철9호선 919공구 건설공사 계약변경 의뢰(7차 1회)

1. 도시철도토목부-15082(2015.11.30.)호와 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(7차)에 대한 계약변경(7차 1회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사

나. 시 공 사 : 삼성물산(주)외 2개사

다. 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링 외 4개사

라. 예산과목 : 도시기반시설본부 도시철도토목부, 도시철도건설, 도시철도 건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

바. 계약현황

(단위:백만원)

구분		총괄	1~6차	7차	장래
계약금액	당초	2014,114	58,050	39,900	106,164
	변경	변경없음	변경없음	변경없음	변경없음
공사기간	당초	‘09.12.31 ~’15.12.29	‘09.12.31 ~’14.01.25	‘14.02.05 ~’15.02.05	-
	변경	변경없음	변경없음	변경없음	변경없음

사. 계약변경 사유 : 효율적인 공사추진 및 예산집행을 위하여 계약금액 및 공사기간 변경없이 7차공사 내역 조정

붙임 : 공사내역 조정 검토보고서 1부.

감리 검토보고서 1부.

설계내역서 1부.

조정현황도 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	정중규		궤도과장	홍숭희		도시철도토목부장	12/01 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-15137	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 9층	/
전화	772-7242	/전송	772-7306	/		/	대시민공개