문서번호	녹지관리과-411
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
김대수	진동엽	01/15 최병언
협 조

조달구매 납품기한 연기 검토보고

2014. 01.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

조달구매 납품기한 연기 검토보고

『조달구매(한양도성 순성길조성공사용 물품구매)』와 관련하여 납품 기한을 연기하고자 아래와 같이 보고합니다.

조달구매 개요

가. 건    명 : 조달구매(한양도성 순성길 조성공사용 물품구매)

나. 도급업체 : ㈜ 에프씨코리아랜드, 초록마당 영농조합법인

다. 도 급 액 : 금50,362,790원

라. 계약일자 : 2013. 12. 30.

마. 납품기한 : 2014. 01. 29.

납품기한 연기 검토

가. 연기기간

- 당  초 : 2013. 12. 30 ~ 2014. 01. 29

- 변  경 : 2013. 12. 30 ~ 2014. 05. 24

나. 연기사유

- 조달구매 납품관련 본 공사인 한양도성 순성길조성공사 기간이 2014. 05. 24일이며, 현재 동절기로 공사 추진이 불가에 따른 조달구매 납품 기한을 연기.

다. 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

❍ 상기 검토결과와 같이 납품기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 납품기한 연기의뢰서 1부.  끝.