투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장 실정보고 내용 검토결과 통보(공사명: 도림천복개좌안보수공사)

1. 공사감독1처-10950(2015.11.25)호 및 10970(2015.11.25)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 현장실정 보고된 사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 승인 통보 하오니 설계 변경 시 반영하여 주시고, 잔여공종에 대하여 관리감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 검토 결과

1) 교면포장 및 교면방수 물량 조정

- 당초: 4,219㎡ → 변경: 4,757㎡

2) 상판보수, 주입줄눈 및 성형줄눈, 유공관 실측물량 조정

연번	공종	단위	당 초	변 경	비고
1	상판보수	㎡	50	84
2	주입줄눈	m	405	408
3	성형줄눈	m	629	685
4	유공관	m	405	713

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	김규춘		시설보수과장	전결 12/03 박병연
협조자
시행	시설보수과-9523	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개