문서번호	건축부-13971
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
권기용		조영수	12/08 안재혁
협조

『서울혁신파크 소규모 건축물(4,8동) 리모델링 건설폐기물 처리용역』

실정보고 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

건 축 부

『서울혁신파크 소규모 건축물(4,8동) 리모델링 건설폐기물 처리용역』

실정보고 검토 보고

『서울혁신파크 소규모 건축물(4,8동) 리모델링 건설폐기물 처리용역』에 대하여 용역자로부터 제출된 실정보고를 검토 보고드립니다

1		용역개요

○ 용 역 명 : 서울혁신파크 소규모 건축물(4,8동) 리모델링

건설폐기물 처리용역

○ 위    치 : 은평구 녹번동 5 (서울혁신파크 내)

○ 용역내용 : 폐기물 수집․운반 및 처리

- 처리물량 : 315.51톤

․건축폐재류 98.82톤, 폐콘크리트 203.73, 혼합폐기물 12.96톤

○ 용역기간 : 2015.08.14. ~ 2015.12.11

○ 용 역 비 : 9,570,000원

○ 계 약 자 : (주)벽성그린산업

2		실정보고 내용

○ 4,8동 건설폐기물 변경 내역

품 명	설계내역 수량(톤)	실수량(톤)	증가 수량(톤)
폐콘크리트	203.73	230.24	26.51
혼합건설폐기물	12.96	41.06	28.51

○ 실정보고 금액 : 2,767,000원(간접비 포함)

- 계약 단가 적용

3		처리 의견

○ 건설폐기물 처리용역자가 제출한 실정보고 내용에 대하여 적정하다 판단되므로 우선 처리하고, 추후 실정보고 사항은 설계변경 처리코자 함.

붙임 : 용역자 실정보고서 1부.  끝.