투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 한강 도심 생태공원확충 조성사업 3차

1. 생태공원과-2905호(2015.12.07.) 관련입니다.

2. 「한강 도심 생태공원확충 조성사업 3차」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	한강 도심 생태공원확충 조성사업 3차
	계약상대자	주식회사 거성토건 (대표 : 강재봉) 남광토건 주식회사 (대표 : 최장식)
	계약일자	2015.01.16. (총 차 : 2013.07.19.)
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경(총차 감53,300천원/3차 증172,770천원), 계약기간 변경 없음
	변경사유	시공수량 증감에 따른 계약금액 조정
기 간 변 경	변경전착공일자		2015.01.16	변경후착공일자	2015.01.16
	변경전금차준기한		2015.12.10	변경후금차준공기한	2015.12.10
	변경전총공사기한		2016.12.10	변경후총공사기한	2016.12.10
금 액 변 경	총부기계약금액			금차계약금액
	변 경 전		6,103,740,000 원	변 경 전	1,735,060,000 원
	변경금액		(감) 53,300,000 원	변경금액	(증) 172,770,000 원
	변 경 후		6,050,440,000 원	변 경 후	1,907,830,000 원

붙     임 : 1. 설계변경내역서 2부

2. 물가변동적용내역서 2부

3. 계약의뢰서 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	12/08 이상국
협조자
시행	총무과-20799	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개(7)