과  장

12/10

공헌구

심사자

한상길

설계자

손영민

설    계

심    사

결    재

2015년12월  일

2015년12월   일

제1회 변경 설계서 (총차분)

공 사 명 :  서울대공원 지하수 보수.보강공사

구               분

금       액

비   고  (증,감)

당  초

변  경

총      공      사      비

￦1,459,539,840원

￦1,527,485,000원

￦67,945,160원

도급비

공    급     가    액

￦1,315,181,673원

￦1,376,950,000원

￦61,768,326원

부   가   가   치   세

￦131,518,167원

￦137,695,000원

￦6,176,833원

계

￦1,446,699,840원

￦1,514,645,000원

￦67,945,160원

이 설 비(폐기물처리비)

￦12,840,000원

￦12,840,000원

공 종	개 요	당 초	변 경	비고(증･감)
트렌치 설치	로드컷팅기	986m	-	-986m
트렌치 설치	핸드파트너	-	903m	903m
준설토 처리	토 사	57㎥	98㎥	41㎥
폐기물 처리	콘크리트	99㎥	115㎥	16㎥

■  공사개요

과  장

12/10

공헌구

심사자

한상길

설계자

손영민

설    계

심    사

결    재

2015년12월   일

2015년 12월   일

제1회 변경 설계서 (1차분)

공 사 명 :  서울대공원 지하수 보수.보강공사

구               분

금       액

비  고

(증,감)

당  초

변  경

총      공      사      비

￦1,000,000,000원

￦997,977,000원

-23,000원

도급비

공    급     가    액

￦903,236,364원

￦903,236,364원

-

부   가   가   치   세

￦90,323,636원

￦90,323,636원

-

계

￦993,560,000원

￦993,560,000원

-

이 설 비(폐기물처리비)

￦6,440,000원

￦6,417,000원

-23,000원

■  공사개요

공 종	개 요	당 초	변 경	비고(증･감)
트렌치 설치	로드컷팅기	856m	-	-856m
트렌치 설치	핸드파트너	-	902m	902m
맨홀설치 및 사다리설치		22개	0	-22개