투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	시설공사 설계변경(총괄 11회, 8차3회) 계약의뢰(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

우리 본부에서 추진중에 있는 “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사”에 대하여 현장여건 변동으로 인한 설계변경(총괄 11회 및 8차3회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사(총괄11회 및 8차3회)

나. 공사개요 : 지하차도 4차로, 연장 736m

다. 도 급 자 :㈜케이에스씨건설외 1사

라. 설계변경 계약 의뢰 내역

1) 계약금액 변경

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증▪감
총 괄 11회	48,804,866,000	47,683,504,000	감)1,121,362,000
8차분 3회	7,551,212,000	6,429,850,000	감)1,121,362,000

2) 설계변경 사유

○ 총괄11회 : 가설사무실 임대기간 연장외 2건, 공종별 준공수량 정산보고등 본부승인 및 설계변경자문회의 자문 결과(2건)에 따른 설계변경과 물가변동에 따른 계약금액조정(제1,2,3,4,5,6회)정산반영.

○ 8차 3회  : 총괄11회 변경분 반영에 따른 공사비 변경

붙임 : 1. 설계변경(총괄 11회 및 8차3회) 검토보고 방침 1부.(별도송부)

2. 설계변경 내역서 각 1부.(별도송부)  끝.

	토목부장
주무관	이한규		광역도로과장	진재섭		토목부장	12/10 노우성
협조자
시행	토목부-26553	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2556	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개