문서번호	교통운영과-24523
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교통개선팀장	교통운영과장
임홍필		유승효	12/16 강진동
협조
	주무관		조혜진

2015년 도로교통소통개선,회전교차로 설치

기본 및 실시설계 용역(강북) 설계변경 보고

2015.12

도시교통본부

(교통운영과)

설계변경(정산) 보고

2015년 도로교통소통개선, 회전교차로 설치 기본 및 실시설계 용역(강북)과 관련하여 설계 지점수 변경에 따른 설계변경(정산)을 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2015년 도로교통소통개선,회전교차로 설치 기본 및 실시설계 용역(강북)

○ 용역규모

- 도로교통소통개선 기본 및 실시설계 27개소

- 도로교통소통개선 모니터링 7개소

- 회전교차로 설치 기본설계 4개소, 실시설계 1개소

○ 용역기간 : 2015.1.2. ~ 2015.12.31

○ 용 역 비 : 143,941,000원

○ 용 역 사 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

□ 설계변경내용                                             (단위 : 원)

구 분	계약금액(당초)	변경금액(변경)	증․감 금액	비 고
기본설계비	35,628,116	37,731,040	증2,102,924
모니터링	2,867,855	2,867,855
실시설계비	26,685,219	21,951,866	감4,733,353
제경비	46,934,240	43,360,337	감3,573,903
기술료	17,920,346	16,555,765	감1,364,581
순원가	130,004,545	122,466,863	증7,537,682
부가가치세	13,000,455	12,246,686	증753,769
손해배상보험료	936,000	856,451	감79,549
총용역비	143,941,000	135,570,000	감8,371,000

□ 설계변경 사유

○ 교통안전시설심의 결과, 유관기관(구청, 경찰청 등) 협의 결과에 따라 설계지점수 변경

- 당초 : 기본 및 실시설계 27개소, 모니터링7개소,회전교차로 설치 기본설계 4개소, 실시설계 1개소

- 변경 : 기본설계 29개소, 실시설계 18개소, 모니터링7개소, 회전교차로 설치 기본설계 5개소, 실시설계 1개소

□ 조치계획

○ 위 보고 내용대로 아래와 같이 설계변경 정산처리하고자 함

- 당초 계약금액 : 143,941,000원

- 변경 계약금액 : 135,570,000원(감8,371,000원)

첨 부 : 1. 설계변경 요청공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.