문서번호	생활환경과-18157
결재일자	2015.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
음식폐기물관리팀장	생활환경과장	환경에너지기획관		기후환경본부장
한성현	구본상	김현식		12/24 유재룡
협 조
	물재생시설과장		이철해

『 중랑물재생센터 내 』

음폐수 반입 협약기간 연장계획

2015. 12. 23

기후환경본부

(생활환경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	도봉구, 강동구
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『 중랑물재생센터 내 』

음폐수 반입 협약기간 연장계획

‘15.12.31.자로 중랑물재생센터로의 음폐수 반입 협약기간이 만료되는 도봉․강동구 음폐수 반입기간을 ’18년말까지로 연장하여 음폐수 처리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 중랑물재생센터로 음폐수 반입하기로 한 협약기간이 ‘15.12.31. 자로 만료됨에 따른 대책 마련 필요

○ 도봉․강동구 음식폐기물 자원화시설의 자체 음폐수 처리시설 확보 지연

- 도봉구 : 시에서 시행한 타당성 조사용역(‘14.7.4~‘15.8.3) 결과를 토대로 우수시설 견학 등을 거쳐 자체 처리시설 확보 검토 중

- 강동구 : 강동 보금자리주택 건설계획에 따라 ‘20. 2월까지 이설 예정으로서 이설시 자체 음폐수 처리시설 반영 예정

○ 물재생시설과에서 협약기간 만료에 따른 향후계획 요구

(물재생시설과-3059, ‘15.11.4)

□ 기존 협약내용

○ 협약기간 : ‘12. 4. 10 ~  ‘15. 12. 31

○ 협약당사자 : 서울특별시장, 도봉구청장, 강동구청장

○ 주요 협약조건

- 중랑물재생센터 내 음폐수 반입기간 : ‘13 ~ ‘15

- 자체 처리시설에서 유수분리 등 처리 후 BOD농도 30,000㎎/L 이하로 반입

- ‘15년까지 자체 음폐수 처리시설 확보

□ 중랑물재생센터 내 음폐수 반입현황

구 분	합 계	도봉	강동
‘14년	92,868톤	21,081톤	71,787톤
‘15년(6월까지)	56,627톤	11,630톤	44,997톤

※ 도봉․강동구의 음폐수 발생량 전량을 중랑물재생센터로 반입 처리중

□ 그간의 추진경위

○ ‘12. 4. 4 : 중랑물재생센터 음폐수 하수연계처리 추진계획 수립

○ ‘12. 4.10 : 협약 체결(시 ⇔ 도봉․강동구)

○ ‘12.4~12 : 음폐수 투입시설 설치공사(공사비 : 48억원)

○ ‘15. 5. 7 : 도봉 자원화시설 자체 처리시설 확보 요구(시 ⇒ 도봉구)

○ ‘15.11. 4 : 협약기간 만료에 따른 대책 요구(물재생시설과 ⇒ 생활환경과)

○ ‘15.12.14~15 : 도봉․강동구 음폐수 저감 및 자체 처리대책 제출

□ 협약기간 연장계획

○ 연장기간 : ‘16.1.1 ⇒ ‘18.12.31(3년)

○ 연장조건 (기타 자세한 사항은 연장 협약서 참조)

- 2015년 반입량 기준, 매년 6%씩 음폐수 반입량 감량

- 도봉․강동구청장은 2016년 3월말까지 서울특별시장에게 자체 음폐수 처리시설 설치계획 제출

따로붙임 : 음폐수 반입기간 연장 협약서 1부.   끝.