문서번호	역사도심재생과-14199
결재일자	2015.12.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	도심관리팀장	역사도심재생과장
정재현	代정재현	12/24 양병현

설계변경 및 정산보고

('15/'16년 광화문광장 제설작업용역, 15년)

2015. 12. 23

도시재생본부

역사도심재생과

설계변경 및 정산보고

(‘15/’16년 광화문광장 제설작업용역 1차년도 정산)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ‘15/’16년 광화문광장 제설작업용역(장기계속)

○ 위   치  : 광화문광장

○ 용역내용 : 제설작업용역 42일

○ 용역기간 : 2014.11.20 ~ 2015.12.31.

※ 총기간 :  2014.11.20 ~ 2016. 3.15.

○ 계 약 자 : 세림중기  대표 임태민

○ 계약금액 : 17,443,900원

□ 변경내역

○ 설계변경 사유

- ‘15/’16년 광화문광장 제설작업용역(장기계속)의 1차년도 제설작업에 투입된 제설인원과 장비사용을 설계변경(정산)하여 지출코자 함.

○ 설계물량 변경내역

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비고
1. 제설인력	시간	856	38	감 818
2. 제설장비 대기	일	18일	1	감 17
3. 제설장비 작업	시간	99	2	감 97

○ 계약금액 변경내역

구 분	계약금액	변경금액	증․감
공급금액	15,858,091원	518,182원	- 15,339,909원
부 가 세	1,585,809원	51,818원	- 1,533,991원
총 용역비	17,443,900원	570,000원	- 16,873,900원

□ 조치계획

○ 위 보고내용과 같이 설계변경(정산) 금액으로 재계약하여 준공.

○ ‘15년 12월25월 이후 강설로 인한 추가 제설비용 발생시 ‘16년 예산을 사용하여 제설 또는 자체 제설작업

붙임 : 당초 및 변경내역서 1부.  끝.