문서번호	건축부-14966
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
정제국		박범규	전결 12/28 안재혁
협 조
	담당자			신종춘
	주무관			임봉규
	주무관			유영선
	주무관			조기성

「성동소방서 신축공사 공사착수를 위한」

공사관계자 착수회의(Kick-off Meeting) 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「성동소방서 신축공사 공사착수를 위한」

공사관계자 착수회의(Kick-off Meeting) 시행계획

「성동소방서 신축공사」계약 완료됨에 따라 적기에 공사완료될 수 있도록, 공사 착공 전 공사관계자 착수 회의를 개최하여 안전 및 품질관리 등 효율적 공사관리 방안 회의를 개최하고자 보고드림

※ 추진근거

○ 공사장 안전사고 재발방지 개선대책(행정2부시장 방침 제318호, 2013.10.17.)

○ 설계설명회(Kick-off Meeting)시행지침[안전관리과-3776, 2014.9.4]

Ⅰ				사업개요

□ 사 업 명 : 성동소방서 신축공사

□ 공사개요

○ 대지위치 : 성동구 행당도시개발구역 공공용시설2블럭(행당동 92-6 소재)

○ 사업규모 : 지하1/지상6층, 연면적 5,194.60㎡

○ 구    조 : 철근콘크리트/철골조

○ 용    도 : 공공업무시설(소방서)

□ 사업추진경위

○ 2012.10.12.          성동소방서신설계획 수립(시장방침 제316호)

○ 2014.01.29.          사업의뢰(광진소방서 → 건축부)

○ 2015.12. ~ 2015.10.  설계용역

○ 2015.12.             시공자, 건설사업관리용역자(감리자) 선정

□ 공사관계자 현황

(단위 : 백만원)

구분	회사명	계약기간	계약금액	비고
시공자	누비종합건설 외1	2016.01.25. ~ 2017.05.24.	5,443
감리자	펨코엔지니어링 외1	2016.01.08. ~ 2017.06.07.	977

Ⅱ				착수회의 계획

□ 일  시 : 2015.12.29.(화) 14:00

□ 장  소 : 도시기반시설본부 11층 대회의실

□ 참석자 :

- 본부 분야별 담당자(건축, 기계, 전기, 조경)

- 사업의뢰부서(광진소방서 소방행정과)

- 공사관계자(시공자, 감리자), 설계자

□ 주요 논의 사항

[설계자]

- 설계의 주안점 및 공사중 유의사항 논의

- 설계에서 가정된 각종 시공법과 절차 등

[시공자 / 감리자]

- 공사중 발생될 수 있는 위험요소 및 통제수단 강구

- 시공계획서, 시공상세도, 안전관리계획 작성 및 적정성 논의

- 전문가 자문 및 추가 설계설명회가 필요한 주요공종 및 일정 논의

- 현장개설계획, 시공방법, 품질관리계획 등 기타 사업추진을 위해 필요한 사항

Ⅲ				행정사항

□ 주요 논의사항은 공사착수계획에 반영(착공서류 제출시 징구 및 확인)

□ 안전 및 품질관련 추가 논의 필요시 전문가 자문 추진

- 자문비는 본부 예산으로 지급

- 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리공사장 안전관리대책 추진, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후계획

○ 2016. 01.    공사착공(16개월)

○ 2017. 05.    공사준공

○ 2017. 06.    시설물 인계인수.  끝.