문서번호	도시철도토목부-16668
결재일자	2015.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정성환		김정수	12/30 김진팔
협조	기획예산과장		안순봉
	주무관		정삼기

『지하철9호선 3단계 921공구 건설공사』 전면책임감리용역 설계변경 검토보고(총괄5회, 6차2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시철도토목부

『지하철9호선 3단계 921공구 건설공사』

전면책임감리용역 설계변경 검토보고(총괄5회, 6차2회)

「지하철9호선 3단계 건설공사」공사기간 조정 보고(본부장)와 관련하여 지하철921공구 책임감리원으로 부터제출된 설계변경(감리용역 총괄 및 차수 계약기간 연장)요청사항에 대한 검토 보고 임.

※도시철도토목부-16559호(‘15.12.28), 유신 감리15-1754(’15.12.29)호와 관련임

□ 책임감리용역 개요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선 3단계 921공구건설공사 전면책임감리용역

○ 계 약 자 : (주)유신 성낙일

○ 계약 및 집행현황 :

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	기 집 행 (준 공)	6차 (금회)	잔여금액
		1차 ~ 5차
계약금액	5,685,689	2,748,939	926,200	2,010,550
용역기간	2009.11.18. ~2016.02.28	2009.11.18. ~ 2015.05.12	2015.05.13. ~2015.12.31	2016.01.01 ~2016.02.28

□ 추진경위

○ ‘09.11.18 : 책임감리용역 계약 및 착수

○ ‘15.05.13 : 6차분 계약 및 착수

○ ‘15.12.28 : 「지하철9호선3단계 건설사업」공사기간 조정 검토보고(본부장)

○ ‘15.12.28 : 책임감리용역 설계변경 요청 -(주)유신

□ 책임감리원 의견

○ 총괄분 감리용역 계약기간, 건설공사기간 조정(1년)에 맞추어 변경

- 당초:‘09.11.18~’16.02.28, 변경:‘09.11.18~’16.12.31.

○ 진행중인 차수용역(6차) 미 투입 감리원에 대한 투입시기 변경

- 당초:‘15.05.13~’15.12.31, 변경:‘15.05.13~’16.05.31.

○ 책임감리용역 설계변경(안)

구분	책임감리용역 계약기간			비고
	당 초	변 경	증,감
총괄(5회)	2009.11.18. ~2016.02.28	2009.11.18. ~2016.12.31.	10월	계약금액은 변경없음
6차(2회)	2015.05.13. ~2015.12.31	2015.05.13. ~2016.05.31.	5월

□ 검토의견

○ 「지하철9호선3단계 건설사업 공사기간 조정 검토 보고(본부장)」에 의하여 지하철 921공구 책임감리원으로 제출된 전면책임감리용역 설계변경(총괄5회, 6차2회)요청 사항에 대하여

○ 지하철921공구 전면책임감리용역  총괄 및 차수계약 기간 변경사항에 대하여 책임감리원 검토의견을 반영, 상기 계약기간 변경(안)대로 계약부서(재무과)에 설계 변경 계약의뢰 조치코자 합니다.

붙임 1. 지하철9호선3단계 건설사업 공사기간 조정 검토 보고서(본부장)

2. 감리단 공문 및 검토 의견서1부.  끝.