문서번호	물관리정책과-10118
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물순환정책팀장	물관리정책과장	물순환기획관
박현우	안준수	배광환	06/18 김학진

서울시 지하수관리계획 수립 용역

준공기한 연기 보고

2015. 6.

도시안전본부

(물관리정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울시 지하수관리계획 수립 용역

준공기한 연기 보고

「서울시 지하수관리계획 수립 용역」과 관련 내실있는 용역결과 도출을 위한 선진사례 조사 및 관련지침 내용 반영을 위하여 준공기한을 연기하고자 보고 드림

1		용역 현황

□ 용 역 명 : 서울특별시 지하수관리계획 수립 용역

□ 계 약 자 : 한국지질자원연구원 컨소시엄

(한국지질자원연구원, 지오그린21, 한국환경정책평가연구원)

□ 계약기간 : ‘13. 5. 27.~ ’15. 6. 30.

(1차 : ‘13.5.27~ ‘14.3.26, 2차 : ‘14.3.27~ ‘15.6.30)

□ 계약금액 : 764,068,010원

(1차 : 339,338,940원,  2차 : 424,729,070원)

□ 주요과업

- 서울시 지하수 관리 비전 및 목표 설정

- 서울시 지하수 부존특성 및 개발가능량 조사․분석

- 서울시 지하수 보전․관리 및 개발․이용계획 수립

- 서울시 지하수 특성에 적합한 지하수 관리

- 지하수 관련 지하굴착 기준 수립 등

2		보고 내용

□ 준공기한 연기 (총차, 2차)

구 분	당 초	변 경
총차 용역	‘13.5.27 ~ ’15.6.30	‘13.5.27 ~ ’15.9.30
2차 용역	‘14.3.27 ~ ‘15.6.30	‘14.3.27 ~ ‘15.9.30

□ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 연기사유

❍ 도로함몰 우려 등으로 사회적 관심이 집중된 지하수 관리에 대한 신뢰도 높은 용역결과 도출을 위하여 ‘이스라엘, 일본, 독일 등 수자원 선진국의 사례와 계획에 대한 추가 조사 및 번역·분석’(시장요청사항, ‘15.3.12)에 따른 용역기간이 추가로 소요되며,

❍ 현재 마무리 단계에 있는 서울지하철 계측관리요령 등의 관련내용 반영에 필요한 소요기간이 절대적으로 부족하여 준공기한을 연기 하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.